문서번호	토목과-7296
결재일자	2017.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		도로관리팀장		토목과장		안전건설교통국장
신영귀		백원기		박주완		06/19 김재겸
협조
	재무과장		임창윤
	계약팀장		문철수

★ ◉

설계변경(제2차) 시행 보고

(2017년 이면도로 포장 및 정비공사)

2017. 6.

성   동   구

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항

설계변경(제2차) 시행 보고

【2017년 이면도로 포장 및 정비공사(연간단가)】

공사개요

공 사 명 : 2017년 이면도로 포장 및 정비공사(연간단가)

공사기간 : 2017. 3. 3. ∼ 2017. 12. 31.

도 급 자 : 옹동건설(주)  대표 원창희

도 급 액 : 금702,130,000원

설계변경 사유

본 예산 중 미발주된 유보액 조정, 서울새활용플라자 주변 가로수 등 시설물 정비에 따른 예산 조정

- 유보액 269백만 원, 서울새활용플라자 주변환경개선공사 23백만원

각종 요구사항 및 물량 변경에 따른 설계 변경

- 지시사항, 의원요구사항, 부서 및 주민요구사항 등에 따른 신규공종 및 물량 증․감 변경 발생

설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
총공사비	867,294,520	1,159,500,000	증	292,205,480
도 급 비	702,130,000	820,270,000	증	118,140,000
관 급 비	105,294,010	241,922,510	증	136,628,500
이 전 비	59,870,510	97,307,490	증	37,436,980

조치의견

본 예산 유보율 조정, 공사 물량변경에 따른 변경사항에 대하여 설계변경 및 정산 처리하고자 함.

붙임  1. 변경설계서 1부.
2. 예산 현황 1부.
3. 설계변경 심사결과통보 1부.
4. 제비율 검증 1부.