<양식1>

공사계약 심사요청서(2016년 영등포구 관내 상수도공사(설계변경 4회-최종))

부분공개(7)

시 행	시설관리과-16615
시행일자
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
접수번호
접수일자

주무관		주무관	시설관리과장			결재
박행종		서규석	06/19 김기상
협 조

공 사 명	2016년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)		요청기관	남부수도사업소 시설관리과
공사위치	영등포구관내(여의도동,양평동,당산동,문래동,영등포동,도림동,대림동,신길동)
공사기간	2016.6.1.~2017.6.30	계약방법			지역제한
공사금액	당초	변 경
	․ 총 공 사 비 : 882,819,240원 - 도 급 비 : 663,819,240원 - 관 급 비 : 219,000,000원	․ 총 공 사 비 : 948,586,000원 - 도 급 비 : 729,586,000원 - 관 급 비 : 219,000,000원
설 계 자	․ 상 호 : 남부수도사업소 ․ 대 표 자 : 전 영 석 ․ 설 계 자 : 박 행 종 (전화번호 : 3146-4605)
발 주 처	․ 담 당 자 : 박 행 종 (전화번호 : 3146-4605)
◦ 공사개요 : 당초 : 관부설 D=13~300mm, L=1,240m 변경 : 관부설 D=13~300mm, L=1,428m ◦ 설계변경 사유 계약물량 증.감사유 발생
◦ 첨부 서류 : 변경설계도서 및 설계변경 사전심사 요청서 1부 끝.

	남부수도사업소장

본문내용을 입력하세요