투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	「한강변 자투리쉼터 조성공사」 설계변경 시행 및 계약의뢰

1. 녹지관리과-2118(2017.4.24.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행 중인 「2017년 한강공원 그늘쉼터 조성공사」 추진과 관련 하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 사 업 명 : 한강변 자투리쉼터 조성공사

나. 위    치 : 뚝섬한강공원 벽천나들목 인근 등 4개소

다. 사업내용 : 느티나무 7주 식재, 벤치 16조 설치 등

라. 공사기간 : 2017. 6. 10. ~ 6.20.

마. 도 급 자 :***************

바. 계약금액                                                   (단위 : 원)

구 분		금 액		증 감	비 고
		당 초	변 경
총공사비		146,589,430	151,767,770	5,178,340
도급비	공급가액	87,133,546	95,658,000	8,524,454
	부가가치세	8,713,354	9,565,800	852,446
	계	95,846,900	105,223,800	9,376,900
관급자재비		50,742,530	46,543,970	△4,198,560

사. 설계변경 사유 : 현장여건 반영 및 관급자재 선정에 따른 금액변동 등

아. 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 이용시설 유지관리, 시설비(100-401-01)

붙   임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증표 1부.  끝.

	공원부장
주무관	홍승진		녹지관리과장	문경재		공원부장	06/19 문길동
협조자	주무관	심옥경		총무과장	박병현
시행	녹지관리과-3009	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0843	/전송	02-3780-0745	/	0522@seoul.go.kr	/	부분공개(7)