시  민

문서번호	시설관리과-12336
보존기간	년
결재일자	2017.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
손현정	김근용	고신석	06/20 이인걸
협 조
	주무관		문병희

시민과 함께 만들어 가는 안전도시 서울

설 계 변 경 계 획 (2회-최종) [2016년 강서, 양천, 구로구 일대 긴급누수복구공사]

2017.  6.

강서수도사업소

(시설관리과)

설 계 변 경 계 획(2회-최종)

[2016년 강서, 양천, 구로구 일대 긴급누수복구공사]

우리사업소에서 시행 중인 「2016년 강서, 양천, 구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)」 에 대한 공종별 물량 증 ․ 감과 계약금액 변동(최종)에 따른 설계 변경을 시행코자 함.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2016년 강서, 양천, 구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요 : 누수복구 1,200개소, 불용관 및 노후관 정비 450개소

다. 공사기간 : 2016. 4. 29 ~ 2017. 6. 30(계 약 일 : ’16.4. 29)

라. 계약금액 : 금2,542,251,870원(총 부기금액)

- 1차(2016년) : 금1,603,140,000원

- 2차(2017년) : 금 939,111,870원

마. 계 약 자 : ㈜범흥건설,  대표 김 판 권

승원건설㈜,  대표 예수희

2. 보고내용

가. 설계변경사유

- 공종별 물량변동(증 ․ 감)에 따른 설계변경 시행

□ 물량증가 : 아스팔트 포장깨기(누수-굴삭기 0.18㎥)외 323개 공종

□ 물량감소 : 아스팔트 포장절단외 809개 공종

나. 주요공종 물량 증감 내역

공 종	단위	당 초	변 경	증ㆍ감
인력터파기(견질토사 0-1m, 누수)	㎥	50	0	감) 50
아스팔트 포장절단(100~150mm),누수	m	3,417	1,245	감) 2,172
되메우기(기계100%)보통 - (굴삭기 0.4㎥,누수)	㎥	1,156	467	감) 689
주름마디 스텐관 부설공(13mm),누수	m	225	353	증)128
슬립인죠인트 접합공(20mm),누수	개소	660	1,270	증) 610
안전칸막이 휀스 설치 및 철거	m	2,675	4,845	증) 2,170
교통정리원	HR	1,948	3,635	증) 1,687
배관성과작성(50mm이하)	건	250	555	증) 305

3. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비	2,674,941,870	2,860,403,000	증) 185,461,130
공 급 가 액	2,311,138,064	2,507,830,000	증) 196,691,936
부가 가치세	231,113,806	250,783,000	증) 19,669,194
도 급 비	2,542,251,870	2,758,613,000	증) 216,361,130
관급 자재비	132,690,000	101,790,000	감) 30,900,000

4. 행정사항

- 상기와 같이 계약금액(도급비) 대비 8.5% 증가되어 본부(재무회계과)로 계약금액

변경에 따른 심의 요청

- 심의결과에 따라 최종 설계변경 시행 및 계약의뢰(본청 - 재무과)

붙  임  1. 설계변경 내역서 1부.  끝.