문서번호	도로보수과-5887
결재일자	2017.6.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
조지웅		이석재	06/20 신응수
협 조
	주무관			이화신

『2017년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부』

설계변경(제1차) 검토 보고

2017 . 6 .

북부도로사업소

[도로보수과]

『 2017년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부 』

설계변경(제1차) 검토 보고

우리 사업소에서 시행중에 있는『2017년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부』와 관련하여 신규 공종 발생 및 시공물량 증·감 등에 따른 설계변경(제1차)을 시행하고자 함.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부

○ 공사개요 : 사고석포장보수 130㎡, 중앙분리대 설치 100경간,

부속물 세척 12,890㎡, 과속방지턱 도색 900㎡

○ 공사기간 : 2017. 03. 06. ~ 2017. 12. 31.

○ 도 급 액 : 263,804,930원

○ 도 급 자 : ㈜은성홀딩스 (대표 : 윤화순)

Ⅱ		설계변경 사유

○ 도로보수과-3807(2017. 4.14.)호 『과속방지턱 점검결과 정비계획 보고』에 따른 과속방지턱 도색.

○ 도로보수과-3977(2017. 4.19.)호 『길음뉴타운 중앙버스정류장 보도정비 시행 계획』에 따른 중앙버스정류장 보도블록 보수.

○ 도로보수과-5522(2017. 6. 8.)호 『중앙버스정류장 보도정비 계획보고』에 따른 중앙버스정류장 보도블록 보수.

○ 도로 및 교통 부속물 순찰 지적사항, 120 민원사항, 관할 경찰서의 요청 사항에 따른 신공종 추가와 시공물량 변경.

Ⅲ		주요 변경 내역

○ 주요 공정 물량 변경 내역

연번	공종	규 격	단위	수 량		증·감
				당 초	변 경
1	과속방지턱 도색	융착식, 수동식	㎡	900	2,067	증)	1,167
2	도색 제거		㎡	-	372	증)	372
3	사고석 포장보수	100*100*100, 주간	㎡	100	1	감)	99
		100*100*100, 야간	㎡	30	1	감)	29
4	구조물 세척	-	㎡	12,890	7,434	감)	5,456
5	델리네이터 설치	단면,가드레일용	개	20	83	증)	63
		단면,토공용	개	15	1	감)	14
		단면,옹벽용	개	50	1	감)	49
6	소형고압블록 걷기	인력T=6,야간	a	-	10	증)	10
7	소형고압블록 포장	T=6,야간	a	-	10	증)	10
8	폐기물 처리비	폐콘크리트	톤	-	93	증)	93

○ 변경금액

(단위 : 원)

구분		수 량		증·감
		당 초	변 경
총공사비		383,312,930	383,312,930	-
도급비	공급가액	239,822,664	237,249,598	감) 2,573,066
	폐기물처리비	-	2,573,066	증) 2,573,066
	부가가치세	23,982,266	23,982,266	-
	계	263,804,930	263,804,930	-
관급비		119,508,000	119,508,000	-

Ⅳ		조치계획

○ 상기 보고와 같이 계약금액 범위내에서 물량 증·감에 대하여 설계변경 시행하고자 함

붙 임 : 설계변경(제1차) 내역서 1부.  끝.