상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 심의회 개최［2016년 도봉,노원구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사(장기계속단가계약)(3차 - 최종)

우리 사업소에서 시행중인 “2016년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 보수공사 (장기계속)”에 대하여 당초 계약물량 외 신규공종 발생 및 물량 증 ․ 감 사항이 있어 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최코자 합니다.

가. 공사현황

○ 공 사 명 : 2016년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 보수공사(장기계속)

○ 주요 신규공종

공종	규격	단위	단가	비고
주철(이형관) 부설공	200mm(야간)	개소	16,187	HNA20201
주철(이형관) 부설공	400mm,지세	개소	23,926	HNA20400
K.P 이탈방지압륜 접합	200mm(야간)	개소	30,795	HNB16201
K.P 이탈방지압륜 접합	400mm,지세	개소	62,744	HNB16400
K.P 이탈방지압륜 철거	400mm,지세	개소	31,371	HNB17400
주철관 절단공(절단기사용)	200mm(야간)	개소	57,343	HNB20201
주철관 절단공(절단기사용)	400mm,지세	개소	48,741	HNB20400
제수밸브 부설 및 접합공	200mm(야간)	개소	118,458	HNB70201
제수밸브 부설 및 접합공	250mm,지세	개소	77,883	HNB70251
제수밸브 부설 및 접합공	400mm,지세	개소	150,041	HNB70400
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=100mm(흄관h=1.66),지세	개소	388,460	HNK14103
원형밸브실 설치공(기초재생PE)
				HNK14204
			517,819
		개소
	D=200mm(흄관h=1.66),(야간)
원형밸브실 설치공(기초재생PE)
				HNK14252
			396,713
		개소
	D=250mm(흄관h=1.66),지세
원형밸브실 설치공(기초재생PE)
				HNK14300
			323,640
		개소
	D=300mm,지세

○ 계약기간 : 2016.07.11 ~ 2017.06.30

○ 도급비 내역 : 553,735,920원

○ 계약업체 : ㈜상명건설    대표 김학진

나. 심의회 개최

○ 심의일정 : 2017. 6. 21(수) 10:00

○ 심의장소 : 급수운영과

○ 심의위원장 : 급수운영과장

○ 심의의원 : 시설6급 이승완, 시설6급 박미영, 시설7급 김재영, 시설7급 박상권

다. 심의내용

○ 신규공종 및 계약물량 증․감에 대한 설계변경 사항

- 물량변동의 적정성 여부

- 계약 변동(증․감) 물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

○ 위 사항을 검토 및 심의하고 심의 결과에 의거 설계변경 조치

따로붙임 :  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 심의신청서 1부.

3. 설계변경내역서 1부. 끝.

주무관	최용진		급수운영과장	06/20 장종욱
협조자	주무관	김재영		주무관	박상권		주무관	박미영
주무관	이승완
시행	급수운영과-13724	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(7)