문서번호	도로보수과-5886
결재일자	2017.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
최완	이석재	06/20 신응수

『2017년 노후포장도로 정비공사(2구역)- 북부』 설계변경(1회) 검토 보고

2017.  6.

북부도로사업소

[도로보수과]

설계변경(1회) 검토 보고

- 2017년 노후포장도로 정비공사(2구역) -북부

우리사업소에서 시행중에 있는『2017년 노후포장도로 정비공사(2구역)』에 대하여 공사추진에 따른 설계변경(1회) 검토 보고임.

관련 근거

○ 경동 북부 제2017-13호(2017.06.16.) : 건설사업관리용역(설계변경 검토서)

공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 노후포장도로 정비공사(2구역) - 북부

○ 공사개요 : 절삭후 덧씌우기 1,397a

○ 공사기간 : 2017.03.15 ~ 2017.12.31

○ 공사금액 : 769,937,220원

○ 도 급 자 : 임하건설(주)  대표 김희숙

설계변경 보고

○ 노선별 절삭후 덧씌우기 신규대가(t=5cm 6차로, t=10cm 4차로) 추가

- 돌곶이로 L=780m, 39a(재생), 오현로 L=230m, 9a(재생)

○ 그루빙 설치 반영(오현로, 인촌로) : 기존 설치된 도로구간에 재설치

○ 관급자재(아스콘, 미끄럼방지) : 단가변동 및 수량 증,감 발생

○ 정비대상 노선별 현장여건에 따른 공정별 수량 증,감 발생

설계변경 내용

○ 공사비 변경내역

(단위:원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비	2,714,937,220	2,835,000,000	증) 120,062,780
도 급 비	769,937,220	799,480,000	증) 29,542,780
관 급 비	1,598,900,000	1,689,420,000	증) 90,520,000
이 전 비	346,100,000	346,100,000	-

○ 주요공종 변경내역

공 종	규 격	단위	수 량		증 ․ 감	비 고
			당 초	변 경
절삭 후 덧씌우기	야 간	a	1,397	1,438	증) 41
아스콘(1등급)	WC-3	톤	16,743	17,235	증) 492

조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 변동분 정비 물량 증ㆍ감에 따른 부족분 예산을낙찰잔액(120백만원)을 활용 확보된 예산범위내에서 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함 .

별 첨 1. 건설사업관리용역(설계변경 검토서) 1부.

2. 설계변경(1회) 내역서 1부.   끝.