상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강동수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경시행(버들초등학교 외 7개소 음수대 급수시설 개선공사)

우리 사업소에서 시행 완료된 아래 공사에 대하여 다음과 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 버들초등학교 외 7개소 음수대 급수시설 개선공사

2. 공사개요 : 당초D=15㎜, L=363m, 변경D=15㎜, L=199m

3. 공사기간 : 2017. 05. 02.～ 09.16.

4. 계약상대자 : 엠에스건설산업(주) 대표 송완동

5. 계약금액

(단위:원)

당 초	변 경	증·감	비고
21,659,710	14,927,000	감)6,732,710	공사연장 감)164m -정신여중 등 당초 계획된 음수대 설치위치 변경에 따른 공사연장감소

6. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,지원사업성시설비(음수대설치사업42201000)

붙  임 : 1. 설계변경 심의 의견서 및 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	최지영		주무관	임인택		급수운영과장	전명수		강동수도사업소장	06/21 신대현
협조자
시행	급수운영과-11183	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-5152	/전송	3146-5189	/		/	부분공개(5)