	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	면목119안전센터 재건축 공사(건축분야) 1차 기성신청에 따른 검사 실시

1. 관련근거

○ 소방행정과-3050(2017.03.20.)호『면목119안전센터 재건축 공사 착공계 접수 및 검사자 지정보고』

○ ㈜아크건설********3호『제1차 기성신청 제출의 건(중랑소방서 면목119안전센터 재건축 공사)』

○ 지방계약법 제17조(검사), 제18조(대가의 지급)

2. 우리 서 면목119안전센터 재건축 공사(건축분야)에 대한 1차 기성신청이 접수되어 아래와 같이 기성검사를 시행하고자 합니다.

계약업체	계약일	공사기간	공사내역(6월 현재까지)	현장감독관	검사자
㈜아크건설 대표 임재욱	2017.03.15.	2017.03.20. ~ 2017.09.15.	○ 가설울타리 설치 ○ 기존 청사 철거공사 ○ 기초 토목공사 - 터파기 및 콘크리트파일 ○ 지하 ~ 2층 바닥 콘크리트 타설 등	소방행정과장 (장비회계팀장)	위. 지종환 (면목119 안전센터장)
					장. 조세현 (계약담당)

※ 검수기간 : 기성확인요청서 접수일로부터 14일 이내

붙 임 : 1. 기성신청서류 1부

2. 감리자 검토 공문 1부.  끝.

담당자	조세현		장비회계팀장	최기영		소방행정과장	06/22 이영훈
협조자
시행	소방행정과-6557	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 (신내동) 중랑소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02)3423-0325	/전송	02)3422-2035	/	aebal@seoul.go.kr	/	대시민공개