문서번호	시설과-3613
결재일자	2017.6.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장
허용석	이춘한	06/23 代이춘한
협 조

<대동물관 외 1개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사> 내역변경 및 정산보고서 검토 보고

2017. 6.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

<대동물관 외 1개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사>

내역변경 및 정산보고서 검토 보고

『대동물관 외 1개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사』와 관련하여 물량 증감 및 보험료 정산 등 공사 변경사항에 대하여 아래와 같이 정산 시행하고자 함

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 대동물관 외 1개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사

□ 공사기간 : 2017.4.13. ~2017.7.11.

□ 계약금액 : 금173,925,920원

□ 계 약 자 :*****************

□ 감 리 자 :*******************

Ⅱ		설계변경 내용

□ 물량 변경 사항

- 대동물관 전기실~ 지하구 입구 구간 TRAY 파손 및 지하구내 고,저압케이블 혼재, 전력간선케이블 포화로 인한 전기안전사고 예방을 위해 케이블 정리 필요

- 고압케이블 설치 규격 변경 : 실정보고[시설과-3175(2017.6.7.)]에 따른 고압케이블 규격을 HFCO 1C/35sq에서 TFR-CV 1C/35sq로 변경 설치

공종	규격	변경전	변경후	증·감	비고
케이블 철거후 재설치	6/10kV EV 3C/60sq	-	180m	증180m	60m×3
케이블 철거후 재설치	CV 1C/95sq	-	172m	증172m	43m×4
케이블 철거후 재설치	CV 4C/70sq	320m	80m	감240m	20m×4
케이블 철거후 재설치	CV 4C/35sq	-	43m	증43m
케이블 철거후 재설치	CV 4C/25sq	40m	150m	증110m	25m×6
케이블 설치	6/10kV HFCO 1C/35sq	405m	-	감405m
케이블 설치	6/10kV TFR-CV 1C/35sq	-	405m	증405m	45mx3x3

□ 주요 변경 내역

구 분	변경사항	변경내역	공사비 증감
대동물관 전기공사 (전기실 ~ 공동구)	- 케이블 철거 후 재설치 물량 증가	- 6/10kV EV 3C/60sq · 신규 195m · 구간 : 전기실~공동구 맨홀 - CV 1C/95sq · 신규 172m · 구간 : 전기실~공동구 입구 - CV 4C/70sq · 감 240m · 구간 : 전기실내 - CV 4C/35sq · 신규 43m · 구간 : 전기실~공동구 입구 - CV 4C/25sq · 증 110m · 구간 : 전기실내	증) 4,097천원
경비 정산	안전관리비, 건강, 연금, 노인장기요양 보험료 정산	안전관리비 : 감1,024천원 - 건강보험료 : 감1,590천원 - 연금보험료 : 감 2,329천원 - 노인장기요양보험료 : 감104천원	감) 5,047천원

□ 공사비 변경 세부 내용

(단위:원)

구 분	변경전	변경후	증·감	비고
1. 대동물관	16,399,050	20,496,530	4,097,480
2. 곤충관	107,216,622	107,216,622	-
공사비 소계	123,615,672	127,713,152	4,097,480
간접노무비 및 경비	27,471,783	23,423,438	-4,048,345	미사용 경비 정산 (안전관리비, 건강,연금,노인)
일반관리비 및 이윤	7,027,018	6,977,883	-49,135
총공사비	173,925,920	173,925,920	-	부가세포함

□ 실정보고

- 공사감리 정산보고 : 극동(대공원)*******01호

Ⅲ		공사금액 변경사항

(단위:원)

구 분		금 액(변경전)	금 액(변경후)	증․감	비고
총공사비		173,925,920	173,925,920	증·감 없음
도급비	공급가액	158,114,473	158,114,473	증·감 없음
	부가가치세	15,811,447	15,811,447	증·감 없음
	계	173,925,920	173,925,920	증·감 없음

Ⅳ		조치의견

□ 상기 변경 내용과 같이 본 공사에 대하여 설계변경(정산) 시행

첨부  1. 준공정산내역서 1부.

2. 공사감리 실정보고 1부.  끝.