상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경설계 용역 준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰

1. 서북권사업과-5300('17. 6.26)호와 관련입니다.

2.「세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업」관련 변경설계 용역에 대하여 아래와 같이 용역 준공기한 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 :「세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업」변경설계 용역

- 계 약 자 : 터미널7건축사사무소 대표자 조창한 외 1

- 계약금액 : 220,200,000원

나. 준공기한 연기 내용

구분	용역기간	용역비(계약금액)	비고
당초	2017. 4.28.~ 2017. 6.26.	220,200,000	증)35일 용역비 변동없음
변경	2017. 4.28.~ 2017. 7.31.

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 합의각서  1부.  끝.

	서북권사업과장
주무관	김성만		개발관리팀장	박해일		서북권사업과장	06/26 차창훈
협조자
시행	서북권사업과-5308	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 4층 서북권사업과	/	http://citybuild.seoul.go.kr/
전화	02-2133-1562	/전송	02-2133-0734	/	dochodo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)