문서번호	보행정책과-7331
결재일자	2017.6.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	보행시설팀장	보행정책과장
이종석	박영기	06/26 이방일

’17년 보행자우선도로 사업효과 분석을 위한 행태조사 용역 시행계획

2017.  6.

’17년 보행자우선도로

사업효과 분석을 위한 행태조사 용역 시행 계획

보행자우선도로 조성사업의 사업비가 각 자치구에 배정됨에 따라 공사 전·후 사업을 비교할 수 있는 행태조사(동영상 촬영) 용역을 시행하여 보행자우선도로의 사후평가 분석에 활용하고자 함

1		추진배경

□ 추진근거

❍ 서울시 도로의 대부분이 12m 미만(77.4%)이고 도로교통공단 통계자료에 따르면 ’15년 이면도로의 보행 사망사고가 44.1%(94명) 비율을 차지함에 따라 보행자의 안전문제를 개선하고자 시행하고 있는,

❍ ’17년 보행자우선도로 사업대상지 18개소에 대해 사업효과와 문제점을 파악 하고 개선하고자 차량과 보행자의 행태조사를 위한 동영상 활영이 필요함.

2		추진계획

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : ’17년 보행자우선도로 사업효과 분석을 위한 행태조사 용역

❍ 용역기간 : 6개월(착수일로부터 180일간)

❍ 소요예산 : ********(부가가치세 포함)

- 예산과목 : 자전거 이용활성화 및 교통환경 개선, 보행환경개선사업, 보행자우선도로 조성, 시설비(401-01)

❍ 계약방법 : 수의계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호

- 사유 : 추정가격이 소액(********)이고 용역 특성상 공사전 동영상 촬영이 진행되어야 하므로 시급성을 감안 보행자우선도로 기초자료 조사 경험이 있는 업체와 계약하고자 함

❍ 용역수행 업체 : ***************

□ 과업내용

❍ 사업지역(18개소) 공사 전·후 동영상 촬영

- 동영상 촬영 자료는 사업대상지의 교통량·보행량 및 통과속도 분석 자료로 활용

※ 설문조사 및 사후평가는 각 자치구 별 공사일정 감안 향후 시행

3		향후일정

❍ '17. 7.	: 사업대상지 공사전 동영상 촬영

❍ '17. 7. ~ 10.	: 자치구별 공사 시행

❍ '17. 10.	: 자치구별 공사 준공

❍ '17. 11.	.	: 사업대상지 공사후 동영상 촬영

❍ '17. 11. ~ 12.	: 사후평가 및 모니터링 시행

붙 임 : 과업내용서 1부.  끝.