투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	북부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	교통안전시설물(교통신호기) 원인자부담공사 공사기간 연장 요청 (도시도속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 북부도로사업소 기전과-4908 (2017. 05. 22.)호 관련하여 우리 본부에서 시행중인『도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사』교통안전시설물(교통신호기) 원인자 부담공사에 대하여 아래와 같이 공사기간을 연장 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사

나. 공사내용 : 교통안전시설물 설치공사(교통신호기)

다. 위    치 : 국민대램프 앞(T-gis 도로명)

라. 공사기간

구 분	당 초	변 경	비 고
교통안전시설 신호기 공사	승인통지일 ~ 2017. 06. 30.	승인통지일 ~ 2017. 12. 29.	182일

마. 변경사유 : 토목공사(아스팔트 포장 등) 일정변경.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박기범		시책사업과장	임현근		설비부장	전결 06/27 권오식
협조자
시행	설비부-10630	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어 플레이스빌딩 15F	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02) 3708-8646	/전송	02) 3708-8659	/	kbpark@seoul.go.kr	/	대시민공개