“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	치수과-15177		주무관	치수팀장		치수과장		안전교통국장		부구청장
			정영상	윤석빈		강태근		박은섭		전결 06/27 주윤중
등록일자	2017.6.27.
결재일자	2017.6.27.
공개구분	부분공개(5)
			협조자		재무과장		정한호
					계약팀장		박성희
					하수팀장		박장용		행정국장		이창훈

『수해없는 안전강남 구현 및 신속한 하수·하천시설물 유지관리를 위한』

2017년 추경 예산사업 시행계획

대상사업 및 발주방법

대상사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	계		연간단가		단일공사		비 고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
하수·하천분야	6	3,913,065	5	3,463,065	1	450,000

① 2017년 관내 하수시설물 보수공사(2차)

② 2017년 관내 하수도 준설공사(2차)

③ 2017년 관내 빗물받이 신설 및 개량공사(2차)

④ 2017년 관내 빗물받이 준설공사(2차)

⑤ 2017년 관내 하천시설물 보수공사(2차)

⑥ 봉은사로 2길 하수관로 개량공사

발주방법 : 별도발주

추진계획

2017년 편성된 추경 예산사업을 7월중 발주 및 조기시행으로 집중호우 등으로

인한 침수피해 및 재난예방 적기 대응.

추경공사 시행시 발생되는 준설토 및 건설폐기물은 별도발주 시행하여 처리.

2017. 6.   .

	강 남 구
(		치수과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 • 동법 시행령 제74조 제1항
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 하수·하천 시설물 유지관리 및 정비를 위한 추경예산 확보
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 2017년 추경예산 범위내에서 공사시행
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 일반주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 타 구도 관련법규에 따라 모든 구에서 시행
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당없음

『수해없는 안전강남 구현 및 신속한 하수·하천시설물 유지관리를 위한』

2017년 추경 예산사업 시행계획

2017년 추경예산으로 확정된 하수·하천시설물 유지관리 사업의 신속한 추진을 위하여 발주 시행계획을 검토 보고하는 사항임.

Ⅰ		사 업 현 황

대상사업 : 총6건 – 3,913,065천원

연간단가 : 5건 3,463,065천원(하수분야 4건, 하천분야 1건)

단일공사 : 1건   450,000천원(하수관로 개량)

사업비 세부현황

(단위 : 천원)

구 분	계		하수분야		하천분야		비 고
	건수	금 액	건수	금액	건수	금 액
계	6	3,913,065	5	3,213,418	1	699,647
연간단가	5	3,463,065	4	2,763,418	1	699,647
하수관로 개량	1	450,000	1	450,000	-	-

Ⅱ		추 진 계 획

공사시행 방법 : 별도발주(6건, 3,913,065천원)

연간단가(5건)

① 2017년 관내 하수시설물 보수공사(2차)

② 2017년 관내 하수도 준설공사(2차)

③ 2017년 관내 빗물받이 신설 및 개량공사(2차)

④ 2017년 관내 빗물받이 준설공사(2차)

⑤ 2017년 관내 하천시설물 보수공사(2차)

- 하수시설물 보수공사, 하수도 준설공사, 빗물받이 신설 및 개량공사와 빗물받이 준설공사는 여름철 수해예방을 위해 시행하는 사업으로서 배수불량 및 노후, 파손 하수시설물의 신속한 복구를 시행하여 태풍에 의한 집중호우 등에 적기에 대응할 수 있도록 하고,

- 하천시설물 보수공사 공사는 산책로, 목재시설물, 자전거도로 등의 노후 파손된 하천시설물에 대해 안전사고 예방 및 이용자의 불편함이 없도록 시행하는 사업으로서 하천(양재천, 탄천, 세곡천) 시설물의 신속한 정비를 위하여 긴급 정비가 필요함.

- 위와 같은 사유로 추경예산 편성된 연간단가 공사 5건을 별도로 조기 발주·시행하여 침수방지 및 시설물 이용자의 안전사고를 예방코자 함.

단일공사(1건)

① 봉은사로 2길 하수관로 개량공사

- 하수관 노후 및 파손과 연결부 이격으로 집중호우 시 침수우려가 있는 하수관로를 개량하여 침수피해 및 안전사고를 사전에 예방하고자 함.

추진일정

별도발주 시행(연간단가 5건, 단일공사 1건)

일정 구분	7월			8월			9월			10월			11월			12월			비 고
공사설계, 일상감사, 계약심사
공사발주 및 계약, 착공
공사 시행
공사 준공

Ⅲ		사업 세부현황

연번	사 업 명	예산액 (천원)	공 사 개 요	비 고
계	6건	3,913,065		별도발주
1	2017년 관내 하수 시설물 보수공사(2차)	999,950	· D300∼800mm, L=1,020m · 맨홀 50개소	하 수 팀
2	2017년 관내 하수도 준설공사(2차)	976,864	· 흡입·인력·기계·바켓준설 1,000㎥ · 세정 35,000m,	치 수 팀
3	2017년 관내 빗물받이 신설 및 개량공사(2차)	499,200	· 빗물받이 신설 110개, 개량 115개 · 연결관 보수 100개	하 수 팀
4	2017년 관내 빗물받이 준설공사(2차)	287,404	· 간선도로 빗물받이 준설 8,952개소 · 이면도로 빗물받이 준설 4,582개소	치 수 팀
5	2017년 관내 하천 시설물 보수공사(2차)	699,647	· 양재천 산책로 보수 9a, · 탄천 자전거도로 및 산책로 14a · 세곡천 산책로 신설 25㎡ 등	하 수 팀
6	봉은사로 2길 하수관로 개량공사	450,000	· 하수관 개량 D600㎜, L=290m · 맨홀 9개소	하 수 팀

Ⅳ		기 타 사 항

별도 발주 추경공사는 계약원가심사 및 일상감사 등 관련절차 이행 후 발주.

추경공사 시행시 발생되는 준설토 및 건설폐기물은 별도 용역발주 시행하여 처리.

붙임 : 공사발주 계획서 각 1부.  끝.