문서번호	시설관리과-17314
결재일자	2017.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	동부수도사업소장
박윤선	유광창	최명익	06/27 홍현구
협 조

준공기한 연기보고

(2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역)

2016. 06.

동부수도사업소

(시설관리과)

준공기한 연기보고

(2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역)

우리사업소에서 시행중인 「2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역」과 관련하여 준공기한 연기사유가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

1. 용역 개요

○ 공 사 명 : 2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역

○ 도 급 자 : **************

○ 계약기간 : 2016.07.22. ~ 2017.06.30.

○ 용역개요 : 건설폐기물 운반 5,775㎥, 건설폐기물 처리 11,247ton

2. 보고 내용

○ 준공기한 연기 사유

- 근거 : 「2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 용역 계약 특수조건」               제2조(계약기간)

- 2017년 건설폐기물 처리용역 계약이 현재 공고중(개찰일 2017.7.4.)으로 2017.7.1. 착공이 어려운 상황으로 2016년도 건설폐기물 처리용역 준공기한 연기가 필요한 실정임

○ 준공기한 변경

- 당초 : 2016.07.22. ~ 2017.06.30.

- 변경 : 2016.07.22. ~ 2017.07.21. (단, 2017년도 업체 계약시까지 연장가능)

○ 귀책사유 : 동부수도사업소

- 지체상금 미부과

3. 조치의견

○ 상기와 같은 사항으로 원활한 폐기물처리를 위하여 공사준공 기한을 연기하고자        합니다.

붙임  건설폐기물 용역 계약 특수조건 1부.  끝.