문서번호	도로보수과-6645
결재일자	2017.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권세봉		代이상하	06/27 한동근
협 조
	주무관			이상하

2017년 교통사고 잦은 곳

개선사업 시행계획 보고

2017.  06. 27.(화)

서부도로사업소

(도로보수과)

2017년 교통사고 잦은 곳

개선사업 시행계획 보고

용산구 녹사평대로 경리단교차로, 한강대로 갑을빌딩 앞 교통사고 잦은곳에 대하여, 교통안전을 저해하는 위해요소를 개선함으로써 쾌적하고 안전한 교통환경을 만들기 위한 개선사업을 시행코자 함.

□ 관련근거

○ 2017년 교통사고 잦은곳 개선사업 예산 재배정 및 사업추진 협조 요청

- 교통운영과-9881(2017.05.25.)  예산배정액 : 51,160천원

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2017년 교통사고 잦은 곳 개선사업

○ 총사업비 : 39,022천원

○ 개선장소

- 용산구 녹사평대로 경리단교차로

- 용산구 한강대로 갑을빌딩 앞

○ 개선내용

- 경리단교차로 : 노면표시 보강 및 삭제, 교차로 진행 유도선 보강, 그루빙 설치, 발광형 표지병 및 이미지험프 설치 등

- 갑을빌딩 앞 : 노면표시 보강, 버스정류장 휀스 LED바 설치, 무단횡단금지시설 설치 등

○ 사업구간 위치도

용산구 녹사평대로 경리단교차로	용산구 한강대로 갑을빌딩 앞

□ 공사내용

○ 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 : 7,464천원(관급자재 포함)

- 노면표시 도색 : 1,801m

- 노면표시 제거 :    26m

○ 교통안전(도로) 부속물 유지보수공사 : 23,436천원(관급자재 포함)

- 그루빙 포장   : 928㎡

- LED경관조명 :    2개

○ 무단횡단금지시설 설치(82m) : 7,008천원(현장설치도)

- 조달구매(현장설치도)로 설치 후 정산 : 갑을빌딩 앞

○ 솔라 점등형 표지병 설치(15개) : 1,114천원(현장설치도)

- 조달구매(현장설치도)로 설치 후 정산 : 경리단교차로

□ 조치계획

○ 긴급을 요하는 공사로서 교통개선공사 발주 시 업체 선정까지 기간소요 등으로 별도 발주시행은 곤란하여 2017년 유지보수공사(연간단가)에 포함하여 시행코자 함.

- 공사기간 : 2017. 06. 22. ~ 2017. 09. 30.

- 노면표시 : 약 5,547천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

- 교통부속물 : 약 22,169천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

○ 관급자재 사용검토

- 노면표시 도색공사에 사용되는 특수페인트는 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사의 납품 계약된 수량 사용 후 정산

- 교통안전 부속물공사에 사용되는 LED경관조명은 조달구매(현장하차도)로 설치 완료하고 추후 정산

- 무단횡단금지시설 및 솔라 점등형 표지병은 조달구매(현장설치도)로 설치 완료하고 추후 정산

○ 사업비 집행 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 재배정액	노면표시	교통 부속물	차선 분리대	점등형 표지병	집행잔액
교통사고잦은곳 개선사업 (국비+시비)	32,140	2,882	21,949		1,114	6,195
교통사망사고 줄이기사업	19,020	4,582	1,487	7,008		5,943

○ 예산과목

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사고 잦은곳 개선, 시설비(401-01)

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사망사고 줄이기사업, 시설비(401-01)

□ 향후계획

○ 2017. 06. 28 : 개선사업 작업지시 및 공사 시행.

○ 2017. 09. 30 : 개선사업 완료.

○ 2017. 10. 10 : 설계변경 정산 및 개선사업 결과보고.

붙 임 : 1. 설계 내역서 2부.

2. 개선사업 실시 설계 도면 2부.

3. 관련 문서 1부.  끝.