문서번호	행정지원과-16470
결재일자	2017.6.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장		남부수도사업소장
정풍년	代신민철	이두영		06/28 전영석
협 조
	주무관		정은희

다목적건물 리모델링 공사

설계변경(정산)보고

2017. 06

남부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

다목적건물 리모델링 공사

설계(정산)변경 보고

우리사업소에서 시행한 다목적건물 리모델링 공사에 대하여 제경비 증·감등이 발생하여 규정에 따라 설계 변경하고 준공정산 처리하고자 보고드림.

Ⅰ		공사개요

❍ 공사명 : 다목적건물 리모델링 공사

❍ 공사기간 : ‘17.3.30 ~ 6.27

❍ 계약자 : 주식회사 엘앤케이 시설물     대 표  임 수 규

❍ 계약금액 : 금163,775,600원

❍ 공사 주요내용

- 다목적건물내 기존시설물 철거후 전면적보수 및 재배치 공사

Ⅱ		설계변경 검토 내용

(단위:원)

구 분	변 경 사 항	증 · 감	비 고
합 계		감)4,355,600원
제경비	-보험료 등 제경비 정산 -제경비 정산에따른 일반관리비,이윤 정산	감)4,355,600원

Ⅲ		계약금액 변경

(단위:원)

구 분	계 약 금 액		비 고
다목적건물 리모델링 공사	변경전	변경후	감)4,355,600원
	163,775,600	159,420,000

Ⅳ		조치계획

❍ 국민건강 보험료, 국민연금 보험료, 노인장기요양 보험료, 산업

안전보건관리비, 하도급지급보증수수료, 건설기계대여금지급보        증서발급수수료, 일반관리비, 이윤 등은 사후 정산제도에 따라        정산 처리하였으며,

❍ 상기와 같이 본 공사에 대하여 설계변경(정산)처리 하고자 함.

붙  임 : 1) 계약변경 합의서 1부.

2) 설계변경 사유서 1부.  끝.