문서번호	토목부-13440
결재일자	2017.6.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김상도		진재섭	06/28 代이동훈
협조

버스정차대 보수비용 반영 검토보고

(새문안로 중앙버스전용차로 설치공사)

2017. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

버스정차대 보수비용 반영 검토보고

(새문안로 중앙버스전용차로 설치공사)

시설물 인수 부서인 서부도로사업소 협의결과에 따라 버스정차대 보수비용을 반영코자 검토보고 드림.

공사현황

○ 사 업 명 : 새문안로 중앙버스전용차로 설치공사

○ 위    치 : 서대문구 미동초교앞~세종대로 사거리

○ 규    모 : 전체 1,200m, 버스승강장 4개소 설치

○ 기    간 : 2016.11.30. ~ 2017. 6.30.

○ 사 업 비 : 3,600백만원(도급비:2,194백만원)

○ 시 공 사 : 국성산업개발(주), 감 리 사 : 제일엔지니어링외 1

○ 공 정 율 : 99%

실정보고

○ 버스정차대와 도로사이 초속경 콘크리트 타설비용 반영 필요

- 버스정차대 경계석과 PC판넬 사이 폭 25cm에 대하여 사전 합동점검시 시설물 인수부서인 서부도로사업소에서 보수 요청이 있어 이에대한 사항 반영 필요

- 아스콘 포설시에는 25cm폭을 다짐할 수 있는 장비가 없어 품질확보가 불가능하며, 일반 콘크리트 타설시에는 양생기간(28일) 고려하여 즉시 개통이 불가능한 실정임.

- 경계석과 PC판넬사이 25cm구간을 PC판넬 강도와 같은 초속경 콘크리트로 타설하여 최단시간내 교통 개방토록 조치할 필요가 있음.

○ 위치도 및 현황사진

세부위치	전경사진

○ 물량 검토

구 분	규 격	단위	당초	변경	증.△감	고
초속경콘크리트타설		㎥	-	9.45	9.45

○ 사업비 검토                                           (단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증.△감	비 고
5. 부대공	-	15,575	15,575
직 접 공 사 비	-	15,575	15,575
간 접 공 사 비	-	2,825	2,825
공 급 가 액	-	18,400	18,400
부 가 가 치 세	-	1,840	1,840
도 급 액	-	20,240	20,240
총 공 사 비	-	20,240	20,240

○ 신규단가적용 검토 :  강제협의율(93.374%) 적용

- 지방자치단체 공사계약일반조건. Ⅶ.계약금액의 조정.1-나항의 "계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우"에 해당되는 설계변경으로 강제협의율 적용. (86.747+100)/2)=93.374%)

검토결과

○ 비용반영을 위한 책임건설사업관리기술자의 실정보고가 타당함으로 승인코자 함.

붙임 : 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.

변경내역서 1부.   끝.