상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 준공기한 연기의뢰

1. 버스정책과-17340(2017.6.27.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진 중인 ‘2016년 가로변정류소 이용환경 개선사업’과 관련하여 아래와 같이 용역 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 내용

용역명	계약상대자	계약금액	준공기한
			당초	변경
2016년 가로변정류소 이용환경 개선사업 건설폐기물 처리용역	㈜벽성그린산업 대표 황윤남	금21,829,500원	2017. 3. 2.~ 2017. 6. 30.	2017. 3. 2.~ 2017. 8. 30.

나. 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부

2. 합의각서 1부.  끝.

	버스정책과장
주무관	강설영		버스정책팀장	지우선		버스정책과장	06/28 김태명
협조자
시행	버스정책과-17354	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문별관 1동 7층	/
전화	02-2133-2293	/전송	02-2133-1049	/		/	대시민공개