문서번호	도시철도설비부-7783
결재일자	2017.6.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		송변전과장		도시철도설비부장
문학준		김영수		06/28 정찬웅
협 조
	신호과장				代김동일
	정보통신과장				추경수

『9호선 3단계 시스템분야 책임감리용역』

감리원 투입계획(총차 2회) 변경 보고

2017. 06.

도시기반시설본부

[도시철도설비부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『서울지하철9호선 연장건설(3단계)시스템분야 전면책임감리용역』

감리원 투입계획(총차 2회) 변경보고

지하철9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 책임감리용역에 대한 분야별 감리원 투입계획(변경) 승인요청에 대한 적격여부를 검토하고, 현장여건등을 감안한 변경검토 내용을 다음과 같이 보고 드림

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 전면책임감리용역

○ 과업위치 : 송파구 잠실운동장 ~ 올림픽공원 ~ 강동구 둔촌동(보훈병원 앞)

○ 과업범위 : 9호선 연장건설(3단계) 사업구간 시스템분야 책임감리

- 연  장 9.14km, 정거장 8개소(변전실 3개소)

○ 계약현황 : 세종기술(주) 외 2개사 공동수급(분담이행방식)

구 분	용 역 기 간	계 약 금 액	비 고
총 차	2015. 1. 5 ~ 2018. 12. 15	2,901,630천원
1 차	2015. 1. 5 ~ 2015. 12. 31	200,000천원	준공
2 차	2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31	650,000천원	준공
3 차	2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31	1,003,000천원	진행중
장 래	2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 15	1,048,630천원

Ⅱ		검 토 배 경

○ 9호선연장건설(3단계) 시스템분야 감리원 투입계획 변경승인요청

(9호선 3단계 시스템분야 감리단 서지9-3 시감 제17-339, 2017. 6. 7.)

- 당초 투입계획(실투입일)

▴‘17.03월 실투입

▴‘17.05월 실투입

▴‘16.10월 실투입

구분	긍 급	’15	’16			2017년												2018년
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
책임감리	특급 (’15.09~’18.12)
송변전	고 급 (’15.09~’18.03)
	중 급 (’18.03~’18.12)
전차선	고 급 (’15.09~’18.02)
	초 급 (’18.02~’18.12)
통신	고 급 (’15.09~’18.12)
	고 급 (’16.04~’18.12)
	중 급 (’16.05~’18.03)
신호	고 급 (’15.09~’18.12)
	고 급 (’17.01~’18.04)
	중 급 (’16.06~’18.12)

- 통신분야

▴‘17.01월 실투입

▸ 공정진행상 투입시기가 도래되지 않아 고급 1명(당초보다 6개월), 중급 1명(당초보다 7개월) 늦게 투입되었음.

- 신호분야

▸ 공정진행상 투입시기가 도래되지 않아 고급 1명(당초보다 2개월), 중급 1명(당초보다 11개월) 늦게 투입되었음.

- 승인요청내용

❍ 1,2차분 미투입 감리원에 대한 투입시기 변경에 따른 총차 분 조정 승인요청

구분	긍 급	’15	’16			2017년												2018년
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
책임감리	특급 (’15.09~’18.12)
송변전	고 급 (’15.09~’18.11)
	중 급 (투입없음)
전차선	고 급 (’15.09~’18.06)
	초 급 (투입없음)
통신	고 급 (’15.09~’18.12)
	고 급 (’16.10~’18.12)
	중 급 (’17.1~’18.12)
	중급(추가) (’18.3~’18.9)
신호	고 급 (’15.09~’18.12)
	고 급 (’17.03~’18.12)
	중 급 (’17.01~’18.12)
	중급(추가) (’18.03~’18.08)

Ⅲ		검 토 내 용

▣ 분야별 주요 공정 일정 및 검토 내용

가. 송변전 전차선 분야

❍ 주요공정 일정

- ’17.  8월 : 변전소 수전

- ’17. 10월 : 전기실 전원 공급

- ’17. 11월 : 전구간 전차선 가압시험

❍ 검토 내용

- 계약금액 변경 없이 용역기간연장(23.5개원)에 따라 당초 고급을 중급,초급 감리원으로 변경 투입 할 계획이었으나 공정특성상 초급감리원의 투입은 공사품질 저하 등 원활한 사업진행을 위하여 불가하다고 판단되어 고급으로 변경 승인 요청 판단됨,

- 사업비 증액 또는 현장여건 변화 등 특수한 감리원 투입계획 변경사항이 발생하지 않았으므로 당초 투입계획대로 시행하고, 품질 저하우려 없이 원활한 공정진행을 위하여 송변전/전차선분야 피크공정인 7월부터 중급감리원을 조기투입하여 공정관리에 만전을 기하도록 함이 타당함(추가투입인원은 직접경비 감소분으로 해소)

나. 통신 분야

❍ 주요공정 일정

- ’17. 12월~’18. 01월 : 전송, 열차무선 설치 및 시험

- ’18. 2월~10월 : 종합무선, 관제전화, 공간화상, 행선안내 등 10종 시험

- ’18. 5월 ~ 개통 : 역무관리 시스템 설치 및 시험

❍ 검토 내용

- 감리원 미투입분(고급 4.816, 중급 6.585, ’16. 4월~’16. 12월)에 대한 금액보전을 위해 중급감리원 추가투입 승인요청 판단됨,

- 감리원 3명(고급2, 중급1)이 투입되고 있으므로 중급감리원 추가투입 시  업무량에 비하여 과다투입

- 이에 따라, 중급감리원 1명은 ’18. 12월까지 연장 투입하여 현장에 원활한 공정이 진행될 수 있도록 변경하는 것이 타당함

다. 신호 분야

❍ 주요공정 일정

- ’17. 12월 ~ ’18. 06월 : 지상 ∼ 차상신호 연계시험

- ’18. 7월 ~ 11월 : 종합시험운행

- ’18. 12개통

❍ 검토 내용

- ‘17.12월 ~ ’18.11월까지는 신호연게시험 및 종합시험운행이 진행되는 가장 중요하고 바쁜 시기로서 고급감리원 1명은 ’18. 12월까지 연장투입하여 현장에 원활한 공정이 진행될 수 있도록 변경함이 타당함.

- 감리원 미투입분(고급 4.816, 중급 6.585, ’16. 4월~’16. 12월)에 대한 금액보전을 위해 중급감리원 추가투입 승인요청 판단되며,

- 자체검토결과 감리원 3명(고급2, 중급1)이 투입되고 있으므로 중급감리원 추가투입 시  업무량에 비하여 과다투입

▷ 통신, 신호분야 감리원 미투입분은 총차 감액보다는 공기연장 등 현장 공정진행 상황에 따라 중급감리 추가 투입을 ’18. 11월 이후로 시기를 조정하고, 정상적 준공(’18. 12월) 시 감리 미투입 금액은 준공정산 하는 것이 적정

Ⅳ		검 토 결 과

가. 송변전/전차선 분야

▣ 송변전 고급감리원(1명) 기간 조정

❍ (당초) ’15. 9월 ~ ’18. 3월

❍ (요청) ’15. 9월 ~ ’18. 12월  * 현재 투입 중

⇒ (검토결과) ’15. 9월 ~ ’18. 2월(1개월 단축)

▣ 전차선 고급감리원(1명) 기간 조정

❍ (당초) ’15. 9월 ~ ’18. 2월

❍ (요청) ’15. 9월 ~ ’18. 6월  * 현재 투입 중

⇒ (검토결과) ’15. 9월 ~ ’18. 2월(변경없음)

▣ 중급감리원(1명) 기간 조정

❍ (당초) ’18. 3월 ~ ’18. 12월

❍ (요청) 투입없음

⇒ (검토결과) ’17. 7월 ~ ’18. 12월(8개월 연장)

▣ 초급감리원(1명) 기간 조정

❍ (당초) ’18. 2월 ~ ’18. 12월

❍ (요청) 투입없음

⇒ (검토결과) ’18. 2월 ~ ’18. 12월(변경없음)

나. 통신 분야

▣ 중급감리원(1명) 추가 투입은 ’18. 11월 이후로 투입시기 조정

❍ (당초) 투입 없음

❍ (요청) ’18. 3월 ~ ’18. 9월 (추가투입)

⇒ (검토결과) ’18. 11월 ~ ’18. 12월 (향후 투입시기 조정)

▣ 중급감리원(1명) 기간연장 적정

❍ (당초) ’17. 1월 ~ ’18. 3월

❍ (요청) ’17. 1월 ~ ’18. 12월  * 현재 투입 중

⇒ (검토결과) ’17. 1월 ~ ’18. 12월

▣ 중급감리원(1명) 추가 투입은 ’18. 11월 이후로 투입시기 조정

❍ (당초) 투입 없음

❍ (요청) ’18. 3월 ~ ’18. 9월 (추가투입)

⇒ (검토결과) ’18. 11월 ~ ’18. 12월 (향후 투입시기 조정)

다. 신호 분야

▣ 고급감리원(1명) 기간연장 적정

❍ (당초) ’17. 1월 ~ ’18. 4월

❍ (요청) ’17. 3월 ~ ’18. 12월  * 현재 투입 중

⇒ (검토결과) ’17. 3월 ~ ’18. 12월(6개월 연장)

▣ 중급감리원(1명) 추가 투입은 ’18. 11월 이후로 투입시기 조정

❍ (당초) 투입 없음

❍ (요청) ’18. 3월 ~ ’18. 8월 (추가투입)

⇒ (검토결과) ’18. 11월 ~ ’18. 12월 (향후 투입시기 조정)

라. 감리원 투입 변경 승인 세부 내용

구분	긍 급	’15	’16			2017년												2018년
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
책임감리	특급 (’15.09~’18.12)
송변전	고 급 (’15.09~’18.03)
	중 급 (’17.07~’17.12) (’18.04~’18.12)
전차선	고 급 (’15.09~’18.02)
	초 급 (’18.03~’18.12)
통신	고 급 (’15.09~’18.12)
	고 급 (’16.10~’18.4)
	중 급 (’17.1~’18.12)
신호	고 급 (’15.09~’18.12)
	고 급 (’17.03~’18.12)
	중 급 (’17.07~’18.12)

마. 현지차량 및 사무보조원 투입기간 조정(‘15.10.16 투입)

- 현 지 차 량 : 38대(실투입기간 반영)

- 사무보조원 : 감 15.1인(53.1인 ⇒ 38인, 실투입기간 반영)

바. 계약금액 검토 : 게약금액 변경 없음

Ⅴ		조치계획

○ 상기와 같이 변경승인하여 원활한 공사진행과 고품질 건설공사를 통하여 개통에 차질이 없도록 하고자 함.

Ⅵ		행정사항

○ 변경승인요청 검토결과를 통보(계약자)하여 합의서 제출

○ 총차 2회 용역설계변경 시행 및 3차분 설계변경 시행.

붙임 1. 통신분야 감리원 투입검토 보고서 1부.

2. 신호분야 감리원 투입검토 보고서 1부.

3. 감리원투입변경세부내역서 1부. 끝.