문서번호	교량안전과-11602
결재일자	2017.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교량관리팀장	교량안전과장
백운경	유제천	06/28 신응수

한강교량 보수보강공사 건설사업관리용역 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6.

교량안전과

「한강교량 보수․보강공사」 건설사업관리용역 설계변경

우리과에서 시행중인『 한강교량 보수․보강공사 건설사업관리용역 』에 대하여 물가변동을 반영한 설계변경(1회)변경에 대한 검토보고임.

용역개요

○ 용 역 명 : 한강교량 보수․보강공사 건설사업관리용역(장기계속)

○ 사업기간 : 전체 : 2017. 1. 5 ～ 2019. 12. 31

(1차 : 2017. 1. 5 ~ 2018. 03. 31)

○ 용 역 사 : ㈜동성엔지니어링 외 2개사

○ 과업범위 : 공사 전반에 대한 건설사업관리(감독권한대행) 용역

○ 도 급 비 : 전체 ; 2,440,000천원  (1차 : 1,000,000천원)

설계변경 검토

○ 변경내역(전체 및 1차분)

구 분		용역비(천원)		비고
		당초	변경
전체분	금액	2,440,000	2,504,200	증) 64,200천원
	기간	‘17.1.5.~’19.12.31 (36개월)	‘17.1.5.~’19.12.31	기간변동 없음
1차분	금액	1,000,000	1,000,000	금액변동 없음
	기간	‘17.1.5.~’18.3.31 (15개월)	‘17.1.5.~’18.3.31	기간변동 없음

○ 전체분 변경내용

- 계약금액

․ 당초 : 2,440,000,000원

․ 변경 : 2,504,200,000원 (증 64,200,000원)

- 계약기간

․ 당초 : 2017. 1. 5 ~2019.12.31. (변경없음)

- 변경사유

․ 2017년도 물가변동으로 인한 총사업비 조정 (물가변동 조정율 : 3.34%)

․ 물가변동 조정 검토금액 : 증) 64,200,000원

○ 1차분 변경내용

- 계약금액

․ 당초 : 1,000,000,000원

․ 변경 : 1,000,000,000원 (변경없음)

- 계약기간

․ 당초 : 2017. 1. 5 ~2018.3.31. (변경없음)

※ 1차 계약분 : 계약금액 내에서 건설사업기술자 투입기간 조정

조치사항

❍ 상기 보고내용과 같이 전체 및 1차 계약분에 대해 물가변동을 반영한 설계변경을 시행하여 건설사업관리용역 업무 추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 내역서(전체 1회)

2. 설계변경내역서(1차1회)

3. 물가변동으로인한 계약금액 조정 보고서 1부.   . 끝.