문서번호	총무과-22734
결재일자	2017.6.30.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		통신관리팀장	총무과장
조윤현		김완집	06/30 정상택
협조

「‘17년 하반기 조직개편에 따른 본관 사무실 재배치관련」

통신네트워크 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6.

행정국

(총무과)

「‘17년 하반기 조직개편에 따른 본관 사무실 재배치관련」

통신네트워크 설치 계획

‘17년 하반기 조직 개편에 따른 본관 사무실 재배치관련 기존 통신시설물(음향설비, CCTV 등)의 철거 및 신규 인터넷회선 설치 등 통신공사 실시로 편리하고 안정적인 통신서비스를 제공하고자 함

1		공사 개요

❍ 공사일자 : ‘17.7.1. ~ 7.8.

❍ 대상부서 : 재정관리담당관 등 6개 부서

- 재정관리담당관, 시민참여예산반(신설), 가족담당관, 동물보호과, 청년정책담당관, 서울역일대종합발전기획단

❍ 공사내용

- 공용회의실 등 음향시설, CCTV, 출입통제단말기 철거

- 시민참여예산반 신설 등 인터넷전화 신규·이전 설치

2		공사 일정

일 정	공사내용	위 치	비 고
‘17.6.30.(금)	▪사전 환경 실사 ▪공용회의실 음향시설, CCTV 등 철거 ▪서울역일대종합발전기획단 태그기 등 철거	공용회의실 (본관 5층) 서울역일대기획단(본관 10층)	통신관리팀
‘17.7.1~7.2. (~12:00)	▪회의실 칸막이 철거 및 이설 도장 작업 등 ▪사무기기 등 재배치 작업	재정관리담당관 시민참여예산반 가족담당관
‘17.7.2.(일) (13:00~20:00)	▪사무실 인터넷전화기, 전화통신회선 설치	“	통신관리팀
‘17.7.7.(금)	▪사무기기 등 재배치 작업	동물보호과
‘17.7.7(금)	▪사무실 인터넷전화기, 전화통신회선 설치	“	통신관리팀

※ 청년정책담당관 인터넷전화기 설치 완료 : ‘17.6.29(목)

※ PC연결 및 행정망 통신상태 확인 : 정보통신보안담당관

3		소요 예산

❍ 소요예산 : 약 5,500천원

- 2017년 본관 청사 통신공사 연간단가 비용 처리

❍ 예산과목

- 행정지원체계 강화, 청사관리, 사무실재배치에 따른 시설개·보수, 시설비

4		행정 사항

❍ 업무 시작 전 모든 통신시설 설치 및 시험 완료 추진

❍ 주말 통신공사 등 작업에 대한 해당부서 사전 작업 고지 요청(해당부서 서무 통보)