문서번호	기전과-4727
결재일자	2017.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
신대중		문준호	07/03 이상호
협조	주무관		이명호
	주무관		김수진

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

준공기한 연기요청 검토보고(강변SK VIEW)

2017. 7.

성동도로사업소

(기  전  과)

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

준공기한 연기요청 검토보고(강변SK VIEW)

교통안전시설물 원인자 부담공사(강변SK VIEW)의 준공기한 연기요청이 접수되어 검토하여 보고드림.

Ⅰ

관 련 근 거

○ TR-원감-0612호(2017.06.30.)
→ 교통안전시설물(신호) 원인자부담공사(강변SK VIEW) 준공기한 연기요청

○ TR-원감-0617호(2017.06.30.)
→ 교통안전시설물(표지) 원인자부담공사(강변SK VIEW) 준공기한 연기요청

Ⅱ

공 사 개 요

○ 공 사 명 : 교통안전시설물(신호,표지) 원인자부담공사(강변SK VIEW)

○ 공사위치 : 광진구 구의동244-5번지 일대

○ 공사기간 : 승인일로부터 ∼ 2017. 06. 30.

○ 원 인 자 : 디·와이건설㈜

○ 시 공 사

- 신 호 : ㈜우진신호

- 표 지 : ㈜다물그린

Ⅲ

준공연기 사유

○ 보고내용

구 분	장 소	당 초	변 경	변경사유
신호	광진구 구의동 244-5번지 일대	- 승인일로부터 ∼2017.06.30.	- 승인일로부터 ∼2017.08.30.	추가규제 및 굴착공사 심의로 인한 공사기간 연장
표지	광진구 구의동 244-5번지 일대	- 승인일로부터 ∼2017.06.30.	- 승인일로부터 ∼2017.07.30.	추가규제로 인한 공사기간 연장

○ 보고자 : ㈜트래픽스 조한철 감리원

Ⅳ

검 토 결 과

○ 감리사 실정보고를 검토한 결과 공사기간 변경으로 인한 준공기한 변경을 승인하고자 합니다.

첨  부 : 원인자부담공사 준공기한 변경요청 1부.  끝.