상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행

1. 우리 부서에서 시행중인 아래 용역에 대하여 설계변경 시행코자 합니다.

가. 용역명 : 차집관로 성능개선 기본 실시설계 용역

나. 개  요 : 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 L=11.2Km, 기타

다. 기  간 : 2016. 4. 20 ~ 2017. 10. 11(1차 : 2016.4.20.~2017.6.30.)

라. 예산과목 : 물순환안전국 물재생시설과, 물재생시설 개선 및 관리,

물재생시설 개선, 차집관로 성능개선, 시설비(206-401-01)

마. 계약자 : (주)이산 외 2개사

바. 설계변경 사유 : 과업 물량 증,감 등(별첨)

사. 설계변경 내역

2. 변경 내역(2차분) - 붙임 세부 내역 및 관련 서류

(단위 : 원)

구 분	금 액		증 감	비 고
	당 초	변 경
도급비 (2차분)	800,000,000	1,100,000,000	300,000,000	‘17년 예산 반영 (※ 총괄 계약금액은 변동없음)

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 변경 내역서 1부.

3. 관련 방침서 1부.

4. 세부 검토내역 1부. 끝.

전문관	박만헌		주무관	최정윤		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	07/04 이철해
협조자
시행	물재생시설과-9765	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개