문서번호	방재시설부-11582
결재일자	2017.7.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
김자환		김인숙	07/05 남궁용
협조

- 경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계) -

공사기간 조정에 따른 가설시설물 손율 추가적용 실정보고 검토

2017. 7.

- 경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계) -

공사기간 조정에 따른 가설시설물 손율 추가적용 실정보고 검토

「경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)」공사기간 조정에 따른 기존 설치되어 있는 가설시설물 손율 변경 추가 적용에 대한 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 방재시설부-8010(2017.5.11.)호 : 준공기한 연기

: 선진경춘(감) 제2017-(2017.7.3.)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)

○ 규    모 : 공원조성 연장(L) 2.5㎞, 면적(A) 67,538㎡

○ 도 급 비 : 3,703백만원(1차분 3,636백만원)

○ 공사기간 : ’17. 1. 2. ~ ’17. 10. 31.(1차분 ’17.1.2.~’17.10.5.)

Ⅱ

검토내용

○ 준공기한 연기에 따라 기존에 설치되어 있는 가설컨테이너, 가설방음벽 및 멀티휀스에 대한 손율 추가 적용

- 준공예정일 연기(‘17.7.1 → ’17.10.31) : 손율 추가 적용(4개월분)

가설컨테이너(3×6m 4동, 3×9m 3동)
가설방음벽(H=3.0, W=2.0, 총 L=241m)
육사삼거리 주변 및 화랑대폐역 등 멀티휀스(H=1.8, W=3.0, 총 L=685m)

○ 수량 대비표

구 분	단위	수 량(m)			비고
		당초	변경	증ㆍ감
부대공
가설컨테이너 (사무실용)3m*6m	m2	-	54	54
가설컨테이너 (창고용)3m*6m	m2	-	18	18
가설컨테이너 (사무실용)3m*9m	m2	-	81	81
가설방음벽 (H=3.0 * W=2.0)	m	-	241	241
멀티휀스 (H=1.8 * W=3.0)	m	-	685	685	-견적서 첨부

○ 개략공사비 증감대비표                                (단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
직접공사비	-	9,908	9,908
제 경 비(부가세포함)	-	2,962	2,962
도 급 액(개략공사비)	-	12,870	12,870
관급자재비	-	-	-
총공사금액	-	12,870	12,870

○ 적용단가 검토

- 신규단가는 2017년 2월 공통단가 적용(조달청 거래실례가격 기준 품목별 단가산정)

- 그외 신규 품목단가 : 조달청 거래가격 기준으로 작성하고 조달청 거래가격물      품으로 등재되지 않는 품목은 물가지 2017년 2월 물가정보, 물가자료, 유통물     가등으로 적용

- 신규단가는 낙찰율(86.746%) 적용

Ⅲ

책임건설사업관리기술단 검토의견

○ 경춘선 폐선부지 공원조성 공사(2단계)와 관련 공사기간 조정에 따른 가설         울타리 손료 변경에 대하여 상기와 같이 검토한 결과

- 경춘선 폐선부지 공원조성 공사(3단계)와 관련 공사기간 연장에 따른 가설시      설물 설치 연장에 대하여 상기와 같이 검토한 결과,

- 3단계 공원조성공사 공기연장(2017.07.01. ⇒ 2017.10.31.) 4개월으로      인한 가설컨테이너, 가설방음벽, 멀티휀스의 임대기간 연장은 유지관리 측면에      서 상기 내용을 반영하는 것이 바람직 할 것으로 사료되며,

- 상기의 변경 사항을 향후 설계변경 시 반영함이 타당 할 것으로 판단됨.

Ⅳ

보고자 의견

○ 상기 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 우선 승인통보하고건설사업관리기술단에 통보하여 추후 설계변경 시 반영토록 조치하고자 함.

붙임  건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.