상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	공사 변경계약(준공기한 연기) 시행 및 의뢰

우리부서에서 시행중인「서천연수원 어울마당 개선공사」에 대하여 준공기간 연기 시행 및 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 서천연수원 어울마당 개선공사

나. 계 약 자 : ************

다. 계약금액 : 62,588,430원

라. 계약일자 : 2017. 5.25.

마. 공사기간 : 2017. 5.29. ~ 2017. 7. 7.

바. 계약변경 요청내용 : 공사 준공기한 연기

구 분	변경 전	변경 후	비 고
공사기간	‘17. 5.29~’17. 7. 7	‘17. 5.29~’17. 7.20	기간연장 (13일)

사. 연장사유

- 현장여건 등 추가공사 이행에 따라 공사기간 추가 소요

붙임 : 1) 준공기간 연기 방침서 1부

2) 준공기한 연기 의뢰서 1부

3) 합의각서 1부

4) 공사 예정공정표 1부.  끝.

	인력개발과장
주무관	윤진석		복지노무팀장	김지형		인력개발과장	07/06 김희갑
협조자
시행	인력개발과-14594	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-5778	/전송	2133-0775	/	prime6@seoul.go.kr	/	부분공개(7)