＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 변경계약(준공기한 연기) 요청〔마포 석유비축기지(탱크5) 상설전시장 전시물 설계 및 제작·설치 용역〕

1. 공원조성과-8103(2017.7.6.)호와 관련입니다.

2. 우리 시에서 추진 중인「마포 석유비축기지(탱크5) 상설전시장 전시물 설계 및 제작·설치 용역」과 관련하여 변경 계약을 아래와 같이 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 마포 석유비축기지(탱크5) 상설전시장 전시물 설계 및 제작설치 용역

나. 계약업체 : ************

다. 계약금액 : **************************

라. 계약기간 : 2016. 4. 22. ~ 2017. 7.10.

마. 변경계약 요청 내용 : 준공기한 연기

구 분	용역기간		비 고
	당 초	변 경
계약기간	2016. 4. 22. ~ 2017. 7. 10.	2016. 4. 22. ~ 2017. 8. 20.	41일 연장

바. 연기사유

- 발주부서 요청사항 반영에 따른 추가 소요기간이 필요하여 용역 준공기한 연장 (전시 콘텐츠 추가 및 보완)

사. 지체상금 부과 검토

- 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	공원조성과장
주무관	양지윤		생활공원팀장	박미애		공원조성과장	07/06 최현실
협조자
시행	공원조성과-8117	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2082	/전송	02-2133-1081	/	ideal2009@seoul.go.kr	/	부분공개(5)