투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	지하철9호선 3단계 시스템분야 전면책임감리용역(총차, 3차) 변경계약 의뢰

1. 재무과 계약번호 20141*******03(`14.12.29) 및 20161*******00 (`16.12.08)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리 본부에서 시행중인 서울지하철 9호선 3단계

시스템분야 전면책임감리용역에 대한 총차 및 제3차 용역계약을 다음과 같이 요청 하오하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : *********************************

나. 용역개요 : 연장 9.14km, 정거장 8개 역사(931 ~ 938정거장)

- 위 치 : 송파구 종합운동장 ~ 강동구 둔촌동(보훈병원앞)

- 범 위 : 지하철 9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 시설공사 책임감리

다. 계 약 자 : 세종기술(주) 외 2개사 공동도급(분담이행방식)

라. 용역기간 : 총차(2015. 1. 5 ~ 2018. 12. 15)

3차(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31)

마. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업,

도시철도 9호선 3단계건설, 시설비 및 부대비, 감리비

바. 변경내용

구 분		변경전	변경후	비고
총차	기간	`15. 1. 5 ∼ `18.12.15	변경사항없음	감리원투입계획변경
	금액	2,901,630천원	변경사항없음
3차	기간	`17. 1. 1 ∼ `17.12.31	변경사항없음
	금액	1,003,000천원	1,004,430천원	증 1,430천원

사. 변경사유 : 감리원 투입계획 변경에 따른 설계변경

붙임 1. 감리원투입계획 변경 보고서 1부.

2. 책임감리용역 내역서(총차,3차) 및 감리원 투입계획변경(총차, 3차) 각 1부.

3. 변경계약 합의서(총차, 3차) 각 1부. 끝.

	도시철도설비부장
주무관	문학준		송변전과장	김영수		도시철도설비부장	07/06 구자훈
협조자	경리과장	최정수
시행	도시철도설비부-8232	(		)	접수		(		)
우	04519	서울특별시 중구 세종대로 125 (태평로1가)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3702-1265	/전송	02-3702-1244	/	namoon@seoul.go.kr	/	대시민공개