문서번호	도시철도사업부-7117
결재일자	2017.7.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		경전철2과장	도시철도사업부장
이덕배		권영민	07/06 박동룡
협조

『신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)』

보조감리원(토목) 추가투입 검토 보고

2017. 07.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

『신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)』

보조감리원(토목) 추가투입 검토 보고

신림선 도시철도 민간투자사업(1공구)에 대한 전면책임감리용역 수행 중 감리원 투입계획에 따라 상주 보조감리원(토목분야)을 추가 투입코자  검토 보고함.

※ 동부엔지니어링(발) 제2017-1676호(2017.07.05.)와 관련임.

□ 관련근거

○ 입찰안내서 제3장 기술용역계약 특수조건 제29조(감리원의 배치 및 교체)

○ 용역계약 감리원 투입계획서(총괄 및 1차, 2016.12.16.)

□ 계약현황

○ 계 약 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)

○ 계약기간 : 총괄 ‘11.11.01.~ ’21.09.07.(제1차 : ‘11.11.01.~ ’17.09.19.)

○ 계약금액 : 총괄 2,745,120천원(제1차 : 376,000천원)

○ 계 약 자 : 동부엔지니어링(주) 외 2개사

□ 감리원 추가투입 요청 현황

○ 감리원 투입현황 및 계획(총괄)

구 분		2016년			2017년					2018년			2019년			2020년					2021년		투입기간	투입여부
		09월			6월		12월			6월		12월	6월	12월		6월			12월		9월
토목	책임감리원 (수석감리사)																						'16.09.08 ~'21.09.07	기 투입
	보조감리원 (감리사)																						'16.09.12 ~'21.09.07	기 투입
	보조감리원 (감리사보)																						'17.07.10 ~'20.02.09	금회 투입예정
	보조감리원 (감리사보)																						'18.06.01 ~'21.02.28
	보조감리원 (감리사보)																						'19.01.01 ~'20.10.10

○ 추가투입 대상 보조감리원 현황

구 분	투입등급	투 입 예 정 자				투입시기
		성명	등급	경력	자격사항
보조감리원 (토목)	감리사보 (상주)	*** **********	**	***** ******	******* ****** *****	‘17.07.10.

○ 투입사유 : 토공 및 가시설공사가 본격 진행됨에 따라 추가 투입계획 시기 도래

□ 검토결과

○ 본 용역계약 감리원 투입계획에 따라 보조감리원 투입시기가 도래 하였으며,

- 총괄 및 1차분 추가투입계획 : ‘17.7.10.(보조감리원 : 감리사보)

- 현재 착수구간 흙막이벽 및 노면복공공사와 토공작업에 따른 시공의 연관성을 위해 시공사의 휴일작업 요청, 안전사고 예방 등 감리원 추가 배치 필요.

○ 추가 투입 요청한 보조감리원은 자격조건을 충족하여 적정함.

- 입찰안내서 제4장 2.2(과업수행 조직)에 따라 상주 보조감리원(감리사보)은 PQ 평가대상에서 제외.

- 감리업무 수행을 위해 건설사업관리(특급), 기술자격 및 경력(10년7월) 등 자격요건을 충족하여 적정한 것으로 판단됨.

□ 조치의견

○ 감리원 투입계획에 따라 추가 투입하는 상주 보조감리원(감리사보)은 자격       조건을 충족하여 감리원 배치계획(‘17.7.10.)을 승인코자 함.

붙임 1. 보조감리원 투입승인 요청 공문 1부.

2. 책임감리원 검토의견서 및 추가투입 감리원 이력 및 자격사항 각 1부.

3. 감리원 투입계획서(총괄 및 1차) 1부.   끝.