문서번호	경제정책과-5413
결재일자	2017.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도시제조업팀장	경제정책과장
노동영		송수성	07/07 김태희
협조
	주무관		남경우

- 2단계 성수 수제화 특화사업 추진에 따른 -

수제화 공동판매장 등 시설 개선 추진계획

2017.07.

경제진흥본부

(경제정책과)

- 2단계 성수 수제화 특화사업 추진에 따른 -

수제화 공동판매장 등 시설 개선 추진계획

노후된 공동판매장 시설개선 및 수제화 특화거리 조성을 통하여 수제화 산업 활성화 및 고부가가치화에 기여하고자 함

Ⅰ		사업 필요성

□ 노후시설물 보수･보강 통한 특화거리 활성화

❍ (성수역 A매장) ’13.11월 조성된 이후 시설개선이 이루어지지 않아 시설 노후에 따른 보수 시급

- 외관 탈색, 누수, 셔터 및 폴딩 도어 파손 등 시설노후 심각

- 매장 뒷편 창문 미설치로 차도를 이용하는 차량 운전자 및 횡단보도 이용 주민들이 한낮에도 어둡고 답답함을 호소

※ 성수 수제화타운홀 미팅(‘16.9월, ‘17.2월, ‘17.3월, ‘17.5월)

❍ (성수역 B매장) ’15.12월 조성된 이후 외관 색상 변경, 상부 유휴 공간 활용 등에 대한 입점업체들의 요구 지속

- 매장 전면개선, 외관 이미지 삽입 등 트렌디(Trendy)한 리모델링을 통해 청년창업공방(4개소) 및 수제화 특화시설(희망플랫폼)과의 조화 추구

- 매장 상부를 물품 보관창고 등으로 활용할 수 있도록 시설 개선

□ ‘서울교통공사(서울메트로) 변전소’ 환경 개선으로 이미지 제고

❍ 뚝섬역 공동판매장 초입에 위치한 서울교통공사 변전소 경관개선 추진

- 수제화 특화시설(희망플랫폼) 조성 효과를 극대화위해 노후‧파손 등으로 도시미관을 저해하고 있는 서울교통공사 변전소 일대 경관개선 병행

※ 일자리대장정(‘16.3.25.)시 시장요청 사항(변전소 부지 환경개선)

Ⅱ		추진 방향

□ 수제화 특화거리 조성 및 성수 변전소 환경개선 추진

❍ 성수역~뚝섬역 공동판매장 구간에 수제화 특화거리 및 ‘잇슈마켓’ 포토존을 조성하고, 변전소 부지 환경개선을 통하여 지역 명소화, 관광객 유치

□ 수제화 특화시설물(희망플랫폼) 주변 조경, 간판 등 정비

❍ 특화시설 주변 조경 보강으로 쾌적한 환경 조성

- 수제화 특화시설 주변이 평상 시 공원으로 활용될 예정으로 현재 공사 설계서 상 조경이 부족하다는 공원 관리부서 의견을 감안해 보강공사 추진

❍ 특화시설 외부에 사업홍보를 위한 LED 간판 및 안내사인 등 제작‧설치

- 수제화 사업홍보 및 볼거리 제공을 위한 옥외 간판 및 사인몰 조성

Ⅲ		세부 추진내용

□ 공동판매장 시설물 개선

❍ (성수역 A매장) 매장 전면 개선 및 뒷면 창문 설치

- 차로에서 공동판매장이 내부 및 상품이 보일 수 있도록 창문 조성

❍ (뚝섬역 B매장) 매장 전면 개선 및 상부 물품보관창고 설치

개선 전		개선 후
現 성수역 공동판매장		공동판매장 외관개선(공통)	A매장 창문 설치(성수역)	B매장 창고 조성(뚝섬역)

□ ‘서울교통공사(서울메트로) 변전소’ 외관개선

❍ 외관 도색(아트 페인팅), 수제화 상징 구조물 설치, 펜스 교체 등

□ 수제화 특화시설 보강 및 즐길거리 제공

❍ ‘잇슈마켓’ 수목 보식 및 경관조명 등 추가 설치

❍ 시설 홍보를 위한 대형 LED 간판 및 안내사인 등 제작

❍ 수제화 이미지 조형물, 벤치, 포토존 조성 등

개선 전		개선 후
現 성수역~뚝섬역 거리		특화거리 조형물	특화거리 디자인(교각)	거리의자 등 조성

Ⅳ		소요 예산

□ 예산활용 계획

❍ 총사업비 : 800백만원

- 공동판매장 수선 및 특화거리 조성 : 670백만원

(단위:천원)

구 분	금 액	산출기초
합 계	670,000	-
공동판매장 시설개선	320,000	▸ 성수역 A·B매장 외관개선(16개소) - 20,000천원 × 16개소 = 320,000천원
변전소 외관개선	120,000	▸ 서울교통공사(서울메트로) 변전소 외관개선 - 120,000천원 × 1식 = 120,000천원
특화시설 조경 등	100,000	▸ ‘잇슈마켓’ 조경 및 경관조명 - 40,000천원 × 1식 = 40,000천원 ▸ 수제화 특화시설 간판(안내사인) 등 제작설치 - 35,000천원 × 1식 = 35,000천원 ▸ 수제화 특화시설 시설 보완 - 25,000천원 × 1식 = 25,000천원
특화거리 조형물	100,000	▸ 포토존(수제화 상징물, 조명사인, 벤치 등) 조성 - 100,000천원 × 1식 = 100,000천원
행사물품 구입	30,000	▸ ‘잇슈마켓’ 행사물품 구매 - 행사텐트: 600천원 × 25개 = 15,000천원 - 진 열 대: 200천원 × 75개 = 15,000천원

- 수제화 체험공방 운영 및 관리비  : 130백만원                (단위:천원)

구 분	금 액	산출기초
소 계	130,000	-
체험공방	100,000	▸ 장인시연 - 100천원/h × 2시간 × 30일 × 5월 = 30,000천원 ▸ 체험공방(청소년) - 5천원(재료비) × 20명 × 2회 × 30일 × 5월 = 30,000천원 ▸ 수제화 제작과정 영상물, 홍보 등 - 영상물(20,000천원), 홍보･광고물 제작(20,000천원)
관리비	30,000	▸ 전기, 수도, 청소, 소방점검 등 - 6,000천원/월 × 5월 = 30,000천원

Ⅴ		향후 일정

❍ 사업비 교부                                   :  ’17. 7월 중순

❍ 성수 수제화 희망플랫폼 무상사용 협약(市-區)    :  ’17. 8월 초

❍ 특화거리 등 설계용역 및 공사발주              :  ’17. 8월

❍ 시설공사 및 준공                              :  ’17. 9~11월