문서번호	조경과-3741
결재일자	2017.7.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	조경과장
김규희	김근주	07/10 강인호

「2017년 치유숲 진입로외 1개소 정비공사」

준공기한 연기 검토 보고

2017.7

서울대공원

(조 경 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「2017년 치유숲 진입로외 1개소 정비공사」

준공기한 연기 검토 보고

「2017년 치유숲 진입로외 1개소 정비공사」 추진과 관련 현안사항 반영을 위한 준공기한 연기가 불기피하여 아래와 같이 보고함

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 치유숲 진입로외 1개소 정비공사

***********************************

*********************************************

****************************************

************************

Ⅱ		현안사항

○ 2017년 치유숲 진입로외 1개소 정비공사 시행 중 현장여건 반영하여 물량 변경 및 추가 공정 발생에 따른 설계변경으로 절대공기 부족으로 공기연장 필요

Ⅲ		조치계획

○ 현안사항과 같이 공사기간 연장이 불가피하므로 아래와 같이 공사기간 연장

구 분	변 경 사 항		비 고
	변 경 전	변 경 후
공사기간	2017. 06. 01 ~ 2017. 7. 11	2017. 06. 01 ~ 2017. 7. 31

- 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.