문서번호	세무과-16269
결재일자	2017.7.10.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		세무정보화팀장	세무과장
박경여		안효무	07/10 조조익
협조

「2017년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업」

월    간    보    고(6월)

2017. 7

재무국

(세무과)

「2017년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업」

월  간  보  고 (6월)

세무종합시스템의 안정적 운영과 서비스 개선을 위해 추진하고 있는『2017년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업』의 6월중 주요 추진과업 내용과 7월중 추진계획에 대하여 보고함.

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사업기간 : ‘17. 1. 4 ~ 12. 31

□ 계약업체(금액) : ㈜씨와이디 정보기술(1,310백만원)

□ 주요 사업내용

○ 응용프로그램 추가개발 및 기능개선

- 정기분 부과 검증관리․자동차세 부과업무․체납차량 번호판 영치업무 개선

- 제증명 발급관리․주민세관리․세입현계 결산관리 및 징수보고 개선

- 주민등록번호 변경정보 조회기능 및 과세자료 정비기능 개선 등

○ 응용프로그램 유지관리 및 운영

- 지방세 부과 징수업무 지원, 사용자 요구사항 반영 및 보완

- 시스템 운영 및 유지관리, 장애예방 및 장애발생에 대한 복구 등

○ 시스템 S/W 유지보수 및 기술지원

- S/W 정기점검 및 기술지원, 장애예방 및 장애발생에 대한 복구 등

Ⅱ		월간보고회의 개최

□ 일시 : `17. 7. 4.(화) 14:00

□ 장소 : 서소문별관 1동 9층 세무과 회의실

□ 참석 : 세무정보화팀 사업관련 담당자, 사업 수행사

□ 내용 : `17년 6월 과업진행 추진실적 및 7월 추진계획 등 보고

Ⅲ		주요과업 처리내용

□ 주요과업 추진실적

과업 구분		총 과업	완료과업			진행과업			잔여과업
			누적합계	6월 완료		합계	진행	지연
신규		28	10	4		4	2	2	14
보완		48	32	3		4	3	1	12
총계		76	42	7		8	5	3	26
유지관리(운영 지원 등)			1,049	166		0	0	0	0
6월 7개과업 완료
					-SFR-016(자동이체) 신용카드 자동납부서비스 시행에 따른 기능개선 -SFR-021(지방소득세) 인터넷 경정청구 기능 개선 -SFR-022(지방소득세) 본점 지자체 경정청구 및 수정신고 통합관리기능 개선 -SFR-023(지방소득세) 지방소득세(법인) 동업기업 세액배분명세 국세청 신고자료 공유 -MAR-001(취득세부동산) 부동산취득세 유형별 과세자료조회보완 -MAR-033(결의) 지방세환급결정결의 보완 -MAR-036(시스템) Win10으로 pc OS업그레이드시 오류없도록 보완
7월 5개과업 진행예정
	-SFR-005[주민세] SFR-005(주민세) 주민세 종업원분 관리개선 -SFR-009[구제제도] 구제제도 기능개선 -SFR-012[현계] 결산관리 기능개선 -SFR-020[담배소비세] 납세담보발급 전자신청기능개선 -MAR-034[38세무] TO_DO LIST 조회 개선

따로붙임 1. 2017년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 월간보고서(5월)  1부.

2. 월간 업무현황 보고서  1부.

3. WBS  1부.

4. 투입인력 임금지급 확인  1부.