문서번호	기전설비과-2695
결재일자	2017.7.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
심보현		김남수	07/10 최진석
협 조

『ʼ2017년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수공사』

공사 실정보고 검토보고

2017. 07.

한강사업본부

(기전설비과)

『ʼ2017년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수공사』

공사 실정보고 검토보고

우리 본부에서 시행중인 「2017년 한강공원 야외수영장 기전설비   분야 보수공사」와 관련, 감독기관(서울시설공단)으로부터 실정보고 사항이 있어 검토내용을 보고하고자 함.

□ 관련근거

공사감독3처-5094( ̓̕17.6.21) : 공사현장 실정보고서 제출̕

□ 공사개요

공 사 명 :『2017년 한강공원 야외수영장』기전설비 보수공사

대     상  : 한강공원 야외수영장 기전설비 분야

공사기간 :  ̕17. 4. 5 ～ 9. 30.(179일간)

공사주요 내용

- 여과기조립 시운전(8개소 53대), 여과포(1,193매), 여과판(41개) 교체

- 버터플라이밸브(150A) 외 각종 제수밸브 63개 교체 등

도 급 비 : 금570,316,500원

도 급 자 : (주) 장수플렌트(대표 한병용)

감독기관 : 서울시설공단 공사감독 3처

□ 실정 보고 내용

현장실정 증감 내역

구 분	보고 내용	검토 및 확인결과	추정금액(증)
뚝 섬	․상수도 제어용 버터플라이 밸브 (65A:7개. 80A:1개) ․기능불량으로 교체	․상수도 유량관리를 위한 적절한 교체	1,409천원
광나루	․전기 배선공사 및 선풍기, 형광등 신규설치	․남여 탈의실 신축공사에 따른 적절한 교체	1,836천원

공사비 집행내역                                             (단위:천원)

도급비	지급액		잔 액
570,316	171,000	선급금	380,131
	19,185	노무비
	190,185	계

□ 보고자 의견

감독기관에서 제출한 공사 실정보고 내용을 검토 및 현장 확인결과, 현장실정에 맞게 반영 되었으므로 선 시공하고 변경 내역은 추후 설계변경하여 반영토록 승인코자 함.

따로붙임 : 1. 공사현장 실정보고서 제출 1부.

2. 공사현장 실정보고서 검토보고서 1부.

3. 접수서류 1부.  끝.