＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 과업기간 연장 요청(보완 제출)

1. 우리부서에서 시행중인 아래 용역과 관련하여 과업기간을 연장요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.<※ 기 제출한 공문(물재생시설과-9818호, 2017.7.5.) 보완 제출>

가. 용역개요

- 건  명 : 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역

- 개  요 : 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 L=11.2Km, 기타

- 용역비 : 1,465백만원( 1차분 : 800백만원)

- 도급사 : ㈜이산 외 3개사

나. 과업기간 연장요청 내용

- 당초 : (총괄) 2016.4.20.~2017.10.11. (1차분) 2017.6.30

- 변경 : (총괄) 2016.4.20.~2017.10.11. (1차분) 2017.10.11

- 연장사유 : 과업 대상구간 일부 조정, 외부 자문회의 개최시기 미도래

로 1차분 용역기간 약 4개월 연장( ※ 붙임 방침서 참조)

- 귀책사유 : 발주부서

붙임 :  1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 변경계약 합의각서 1부.

3. 관련 방침서 1부. 끝.

	물재생시설과장
전문관	박만헌		주무관	최정윤		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	07/07 이철해
협조자	계약1팀장	조현
시행	물재생시설과-9964	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개