문서번호	도로포장연구센터-1486
결재일자	2017.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
윤상열		백종은	07/11 한민희
협조
	주무관		이창민

도로포장 상태 조사·분석 및

동공탐사 추진실적 보고

(2017.06.05.~06.30.)

2017. 07

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

도로포장 상태 조사·분석 및 동공탐사 추진실적

□ 보고일시 : ‘17.06.05.~06.30.

□ 보고내용

◯ 도로포장 상태 조사·분석

구 분			도로포장 상태 조사·분석							비고
			계획물량 (a)	조사실적		분석실적		잔여 물량 (a-b)	금주 계획
				금월	누계(b)	금월	누계
합계		연장(㎞)	2,361.4	287.7	1,894.7	75	223.3	466.7
‘17년도 전수조사		개소	117	1	57	6	15	61
		연장(㎞)	2,201.4	44.5	1,886.9 (85.7%)	183	406.3 (21.6%)	314.5
장기공용성 (LTPP)		개소	113		113			· 조사 : ‘17.06.30. 완료 · 분석 : ‘17.07.03.~07.14.
		연장(㎞)	112.91		112.91
	서울형 포장설계법	개소	29		29
		연장(㎞)	17.8		17.8
	맞춤형 고내구성	개소	16		16
		연장(㎞)	6.54		6.54
	저소음· 배수성포장	개소	6		6
		연장(㎞)	3.73		3.73
	예방적 유지보수	개소	62		62
		연장(㎞)	84.84		84.84
	성능보증제 시험시공	개소
		연장(㎞)

※ 장기공용성(LTPP) 구간 및 연장은 도로관리과와 협의에 의거 확정(‘17.06.30)

※ 예방적 유지보수는 현장 확인 후 도로관리과와 협의 후 구간 및 연장 확정 예정

◯ 동공탐사 조사현황

구 분		동공탐사 조사․분석
		계획 물량 (a)	조사실적		분석실적		잔여 물량 (a-b)	금주계획		비 고
			금월	누계(b)	금월	누계		조사	분석
1 차 조사 (km)	함몰개연성 높은 구간	230	0 (0*)	176.4 (35.1*)	11.2	47.4	53.6	10	30	* 도로연장 기준
	요청구간	-	1.6	4.4	1.6	4.4	-	-	-
2 차 조사 (개소)	분 석	-	-	-	16	20	-	-	-
	천 공	135	-	-	-	12	-	-	-
	발 견	-	-	-	-	9	-	-	-

※ 함몰개연성 높은 구간 잔여물량에서 버스전용차로는 야간조사, 불법주정차가 구간은 주간조사 수행 예정(야간에 불법주정차가 더 많음)

- 지역별조사현황(‘17.01.01. ~ ’17.06.30.)

지역별 현황
연번	자치구	연장(km)			동공(개소)
		탐사	분석	계획	분석	천공	발견
1	중 구	0.60	0.60	-	-	-	-
1	서초구	0.60	0.60	-	-	-	-
2	강남구	0.1	0.1	-	-	-	-
3	송파구	1.5	1.5	-	1	-	-
4	강동구	0.8	0.8	-	-	-	-
5	강서구	75.9	43.2	106.2	13	8	5
6	양천구	91.6	4.6	111.8	6	4	4
7	영등포구	9.6	0.3	12.0	-	-	-
8	노원구	0.2	0.2	-	-	-	-
계		180.8	51.8	230.00	-	-	-

- 장비운용현황(‘17.01.01. ~ ’17.06.30.)

연번	구분	장비운용현황(일)
		함몰개연성 높은 구간	요청구간	함몰연구	기타구간	계
1	동공탐사 자료취득 (차량형 GPR)	19	7	5	-	31
2	천공, 영상촬영	-	4	-	-	4
3	장 비 시 연	-	-	-	6	6
4	장 비 점 검	-	-	-	7	7
5	FWD, 핸드형GPR	-	3	3	-	6