문서번호	녹지관리과-6042
결재일자	2017.7.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	녹지관리팀장	녹지관리과장
김완수	임광빈	07/11 김윤철
협 조

공사 실정사항 검토 보고

(한양도성 재해 위험수목 정비공사)

2017. 7.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

공사 실정사항 검토보고

(한양도성 재해 위험수목 정비공사)

우리 사업소에서 시행 중인『한양도성 재해 위험수목 정비공사』추진 중 다음과 같은 실정사항이 발생하여 아래와 같이 공사에 반영코자 함

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 한양도성 재해 위험수목 정비공사

❍ 공사기간 : 2017. 6. 15~ 8. 3.

❍ 사 업 비 : 9,160,500원 (도급: 9,160,500원)

❍ 공사개요 : 재해위험지 제거 79개소

❍  도 급 자 : **************

Ⅱ		변경내역

공 종	단위	변경 수량		증,감	증,감액	사 유	검토 의견
		당초	변경
재해위험지 제거 (B41-50)	개소	0	3	증	1,312,782	작업중 정밀 검사 결과 한양도성과 연접된 수목으로 병해충 감염 등 위험지로 판명	승인
재해위험지 제거 (B51-60)	개소	0	2	증	1,411,866	작업중 정밀 검사 결과 한양도성과 연접된 수목으로 병해충 감염 등 위험지로 판명	승인
크레인 사용	대	0	2	증	865,002	노거수로 사다리 사용 불가	승인

Ⅲ		설계변경 후 예상 증감액

❍ 공사비 증・감 내역

구분		소 요 금 액			비고
		당 초	변 경	증
총 공 사 비		9,160,500	14,436,000	5,275,500
도급비	소 계	9,160,500	14,436,000	5,275,500
	공급가액	8,327,727	13,123,636	4,795,909
	부 가 세	832,773	1,312,364	479,591
관 급 자 재 비		-	-	-

(단위 : 원)

Ⅳ		향후계획

○ 위 검토내용을 시공업체에 조치토록 통보하고, 공기내 공사가 마누리 될 수 있도록 현장감독에 만전을 기하하고자 함.

붙임 : 현황사진 및 변경내역서 각1부. 끝.