문서번호	도시빛정책과-8531
결재일자	2017.7.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★실무사무관	도시빛정책팀장	도시빛정책과장
박관현	代박관현	07/11 서대훈

「서울시 빛공해 환경영향평가 용역」

참여 연구원 변경 및 6월 공정 보고

2017. 7.

도시빛정책과

「서울시 빛공해 환경영향평가 용역」

참여 연구원 변경 및 6월 공정 보고

「서울시 빛공해 환경영향평가 용역」관련, ㈜아이라이트에서 참여연구원 변경 요청 및 6월 공정보고【제2017-070701호(2017.7.07】에 대하여 보고 드림

Ⅰ		용역 개요

□ 용 역 명 : 서울시 빛공해 환경영향평가 용역

□ 용역업체 : ㈜아이라이트외 1개사(한국조명디자이너 협회)

□ 용 역 비 : 107,250천원

□ 용역기간 : ‘17.4.21 ~ 11.16(착수일로부터 210일간)

□ 과업범위

서울시 전역 300개소 (25개 자치구 용도지역별 대표지역 12개소)

□ 과업내용

조명환경관리구역(제1종~제4종)의 빛환경에 대한 빛공해 환경영향평가

- 시민의 생활환경, 자연환경,유동인구, 용도지역 등 제반사항을 고려

빛환경 측정, 조사, 분석, 영향평가, 통계화 등

Ⅱ		참여인력 변경 요청

【(주)아이라이트 2017********01호(2017.7.07)】

구 분	성 명	투입계획		기 간	변경사유
		시 작	종 료
당 초	김재민	2017.5.30	2017.10.29	5개월	기존 직원 퇴사로 인한 신규인원 투입
	김건영	2017.6.17	2017.11.16	5개월
변 경	윤성민	2017.7.12	2017.11.16	4개월
	이주현	2017.7.12	2017.11.16	4개월

Ⅲ		참여인력 변경 검토보고

당초 기술 제안서 평가시 분야별 책임기술자 평가와 관계없는 보조인력        변경이므로 참여인력 변경을 원안 승인하고자 함

구 분	성 명	투입기간		기 간	변경 사유
		시 작	종 료
보조인력	김재민	2017.5.30	2017.7.11	41일	기존 직원 퇴사로 인한 신규인원 투입
	김건영	2017.6.17	2017.7.11	25일
	윤성민	2017.7.12	2017.11.16	4개월 4일
	이주현	2017.7.12	2017.11.16	4개월 4일

Ⅳ		6월 공정보고

빛공해 환경측정‘ (’17.6.14 ~ 6.30) : 전체 300개소중 54개소 측정 완료(18%)

- 강남구 8개소, 강동구 11개소, 강서구 12개소, 광진구 12개소, 송파구 11개소

※ 강동구 1개소(표준지 No.9번 길동자연생태공원), 송파구 1개소 (표준지 No.9번  방이동 생태경관 보전지역) 미측정 사유

▶  강동구 길동자연생태공원은 야간에 운영하지 않아 측정 불가로 대체표준지 선정요함             - 현재 용역사에서 주변지 변경 검토중으로 8월중 측정예정

▶  송파구  방이동 생태경관 보전지역은 당초 자연녹지 주변의 공간조명을 측정하고자 하였으나              아파트 신축으로 측정 조건이 맞지 않으므로 '석촌동 고분군 주변 주택가(저층주거밀집지역)‘              로 표준지 변경 예정임

- 현재 용역사에서 변경 검토중으로 8월중 측정예정

Ⅴ		7월 업무 수행계획

빛공해 환경측정  : (7월까지)전체 300개소중 누계 154개소 측정 예정(51%)

- 7월 : 100개소 측정 예정(강남구 4개소, 서초구 12개소, 마포구 12개소, 동작구 12개소,                 은평구 12개소, 관악구 12개소, 종로구 12개소,금천구 12개소, 중구 12개소)

※ 8.21 ~8.23 측정 예정 영등포구 표준지 No.1(밤섬) 측정을 위한 협의완료

- 한강사업본부 환경과(02-3780-0792 길인자 주무관) - ‘관련공문 참고’

Ⅵ		보고자 검토의견

7월초부터 장마(강우)지속 등으로 당초 측정 일정표(‘17.6.14~9.20)          보다 약간 지연이 예상되나, 용역 준공기한 (’17.11.16)이전 완료가         예상됨

Ⅶ		향후 계획

□ 빛환경 측정 및 분석 : 6.22. ~ 9.21(3개월) - 약간 지연예상

□ 분석자료 통계화 및 성과품 작성 등 : 9.22 ~ 11.16(2개월)

붙  임 : 공문 등 관련자료 각 1부. 끝.