＂명품 아리수, 명품 강남수도!＂
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	현장실정 보고에 대한 회신(이수고가차도~사평지하차도간 배수관 정비공사)

1. 공사감독2처-6405(2017.7.4)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 우리사업소가 발주하고 귀 공단에서 감독중인 “이수고가차도~사평지하차도간 배수관 정비공사”의 현장실정 보고사항에 대하여 아래와 같이 검토결과를 회신하오니 공사관리에 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 설계변경시 중복사항, 과다사항 등이 없도록 하고 현장지도시 확인내용 및 감독자 증빙자료(시공사진, 설계도서 등)에 따라 정확한 설계변경이 되도록 처리하시기 바랍니다.

가. 실정보고에 대한 검토결과

구 분	현 황 및 문 제 점	공 단 의 견	검토결과
시공방법	1. 강관자재 방사능투과시험비 2. 구형밸브실 시공방법 변경 3. 강관부설 터파기폭 조정 4. 상기와 같이 시설공단의 현황 및 문제 사항임	1. 강관자재 방사능투과 시험을 시행하고, 시험비용을 설계 에 반영, 2. 구형제수밸브실 설치에 필요 한 자재를 공장에서 ㄱ자형 코너형벽돌(기성품)로 제작 하고 현장에 운반시공하여 작업시간 단축, 시공품질 향상 3. 강관부설 비용접부 경사면의 구배를 완화(터파기폭B=2.4m 조정)하여 안전사고 예방 및 용접작업 여유폭(B=0.55m) 확보 시공	1. 강관자재 방사능투과 시험 을 시행하고, 시험비용을 설계에 반영, 2. 구형제수밸브실 설치에 필 요한 자재를 공장에서 ㄱ 자형 코너형벽돌(기성품) 로 제작하고 현장에 운반 시공하여 작업시간 단축, 시공품질 향상 3. 강관부설 비용접부 경사면 의 구배를 완화(터파기폭 B=2.4m조정)하여 안전 사고 예방 및 용접작업 여 유폭(B=0.55m)확보 4. 귀 공단 의견대로 조치하 시기 바라오며 향후 설계변 경시 반영하시기 바람.

끝.

	강남수도사업소장
주무관	강희창		시설관리과장	전결 07/12 박희철
협조자
시행	시설관리과-16223	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)459-4	/
전화	02-3146-4905	/전송	02-3146-4939	/	jin2ju@seoul.go.kr	/	대시민공개