문서번호	시설보수과-5022
결재일자	2017.7.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김석수		윤승범	07/13 이인근
협 조

『센터 주요 공정용 유량계 검교정 용역』 설계변경 검토 보고

2017. 07.

중랑물재생센터

시설보수과

센터 주요 공정용 유량계 검교정 용역 설계변경 검토 보고

우리센터에서 시행중인 『센터 주요 공정용 유량계 검교정 용역』의 설계변경 사유가 발생 이를 검토 후 보고드림

1		용역개요

□ 용 역 명 : 센터 주요 공정용 유량계 검교정 용역

□ 용역기간 : ‘17.05.10 ~ ‘17.7.13

□ 계약금액 : 금14,319,800원

□ 용역업체 : ㈜그린플로우 대표  송행숙

2		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

- 교정대상 39개소 중 4개소(#3처리장 생슬러지 유량계)는 유량계 교체공사와 중복되어 이를 제외한 35개소 교정비 금액으로 변경계약코자 함

‣ 관련문서 : 센터 공정용 유량계 설치공사 준공검수[시설보수과-4841](’17.07.19)

□ 용역비 변경현황(감 1,821.600원)

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증 감(원)	비 고
총용역비	14,319,800	12,498,200	감 1,821,600

□ 설계변경 금액 : 12,498,200원

3		검토의견

□ 위와 같이 설계 변경하여 계약변경 추진코자 함

4		행정사항 및 향후계획

□ 설계변경 시행 및 계약의뢰(시설보수과 ⇨ 관리과)

□ 용역 준공

붙임. : 설계변경 내역서 및 합의각서 1부. 끝.