문서번호	시설관리과-16464
결재일자	2017.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
김일구		07/14 박희철
협조

공사 실정보고서 검토보고 (잠원동 50-1외 6개소 배급수관 정비공사)

2017. 07.

공사 실정보고서 검토 보고

『잠원동 50-1외 6개소 배급수관 정비공사』와 관련하여 감독을 시행하는 서울특별시시설관리공단으로부터 공사실정보고서 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.(공사감독2처-6936, `17.7.14)

공사현황

가. 공 사 명 : 잠원동 50-1외 6개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2017. 05. 23. ~ 2017. 11. 28.

다. 도 급 액 : 628,755,900원

라. 공사개요 : D=150~300mm,  L=2,400m

마. 도 급 자 : ㈜일승토건 대표 박명환

바. 감 독 자 : 서울특별시시설관리공단 공사감독2처

아. 발 주 청 : 강남수도사업소 시설관리과

실정보고 현황

가. 3구간 분기방법 부단수 천공 분기작업으로 변경

1) 현황 및 문제점

- 당초 설계된 단수 분기작업을 시행할 경우 대규모 단수로 인한 주민 불편 예상

2) 검토의견

- 대규모 단수에 따른 시민불편이 예상됨에 따라 분기방법을 부단수 천공 분기작업으로 변경함이 타당

- 개략공사비 : 증) 약 520천원

나. 6구간 분기방법 라인스토핑으로 변경

1) 현황 및 문제점

- 당초 설계된 단수 분기작업을 시행할 경우 대규모 단수 및 상가 밀집지역에 영업에 지장 초래

2) 검토의견

- 대규모 단수 및 상가밀집 지역의 민원 발생이 예상됨에 따라 분기방법 변경 타당하다 사료됨

- 개략공사비 : 증) 약 3,680천원

실정보고 검토의견

가. 상기 보고내용과 같이 시설관리공단의 검토의견이 타당하다고 사료됨

조치 계획

나. 상기 검토의견과 같이 분기방법 변경에 대하여 우선 공사시행하고, 향후 설계변경에 반영토록 서울특별시시설관리공단에 회신코자 함.

붙임 : 공사실정보고서 제출 1부.  끝.