문서번호	토목부-14828
결재일자	2017.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박운용		명경출	07/14 김영수
협조
	환경시설과장		유현수

교각 기초 PILE공법 및 규격 변경 검토보고

- 세운상가 청계천 연결 보도교 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.

도시기반시설본부

(토목부)

교각 기초 PILE공법 및 규격 변경 검토보고

- 세운상가 청계천 연결 보도교 -

건축부에서 시행중인「세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사」중  “청계천 연결 보도교”의 교각 기초 PILE공법 및 규격을 현장여건에 최적화하여 변경 추진코자 검토보고 드림.

▢ 관련근거

○ itm 916 제17-0584호 : 실정보고(교각 기초규격 및 PILE공법 변경)

▢ 공사개요

○  위   치  : 세운상가~청계,대림상가

○  규    모  : 청계천 연결브릿지(2개소)

구 분	연결 보도교-1	연결 보도교-2
연 장	55.262m	54.597m
폭 원	8.0m	8.0m
상부구조	S.T BOX PLATE GIRDER
기초형식	MICRO-PILE

○  공사기간  : '16. 3. 24. ~ '17. 8. 23

○  시 공 사  : 성보산업㈜외 1

○  감 리 사  : 아이티엠코퍼레이션외 1

▢ 관련 추진경위

○ 2016. 4. ~ 6. : 지장물(KT, SKT, 한전, 상수도, 하수도, 도시가스) 이설 요청

○ 2016. 7. 7.~ 7.13 : 교각 기초 위치(8개소) 터파기(지장물 확인) 실시

○ 2016. 7.14 : 유관기관 합동 지장물 확인

○ 2016. 7.25 ~ 7.26 : 유관기관 협의 (한전,KT,SK,LG,에스코)

- 설계 교각 위치는 지장물 다량 및 이설공간 부족으로 기초 설치 불가

○ 2016. 8.20 ~ 8.23 : 터파기 구간(8개소) 되메우기 및 콘트리트 포장

○ 2016. 9.02 ~ 9.08 : 기초설치 가능구간 지장물 확인 추가 터파기 실시

○ 2016. 11. ~ 2017. 2. : 청계천 연결 보도교 재설계 시행

▢ 건설사업관리단 보고내용

○ 검토의견

- 청계천 연결보도교 당초 교각부 위치 지장물 확인 터파기(2016.7.7.~13) 결과 다량의 지장물(KT, SKT, 한전, 상수도, 하수도, 도시가스)이 매설된 상황이었고, 유관기관 합동회의 결과 이설공간 부족 등으로 당초 설계 위치에 교각 기초 설치가 불가한 실정이었음.

- 교각 기초 설치 가능 위치로 재설계하였으며, 현장여건을 최대한 고려하여 허용지지력을 확보토록 적용한 기초 PILE공법 및 규격 변경은 타당함.

○ 교각 기초 PILE공법 및 규격 변경 검토

- 당초설계 교각위치에 다량의 지장물로 기초 시공이 불가하여 교각위치를 조정하고 현장여건에 맞추어 교각 기초 PILE공법 및 규격 변경

구 분	당 초	변 경	변경 사유
기초 PILE공법	강관PILE (D406mm, 4EA/개소)	마이크로PILE (D150mm, 12EA/개소	차량 및 보행자 통행이 빈번하고, 강관파일 항타로 인한 진동 및 소음으로 극심한 민원발생 예상
기초 규격	3m×3m	2m×3m	건물기초 저촉 최소화

- 당초설계 교각 기초

(강관파일 D=406mm, 4EA/개소, 기초규격  3m×3m)

- 변경설계 교각 기초

(마이크로파일, D=150mm, 12EA/개소, 기초규격 2m×3m)

▢ 수량 증감 대비표

공 종	당 초	변 경	비 고
구조물터파기	194㎥	340㎥
되메우기 및 다짐	128㎥	294㎥
강관파일(D=406㎜)	544m	-
천공 후 항타	512m	-
동재하시험	4회	-
마이크로파일(D=150㎜) 케이싱 근입	1,698m	-
마이크로파일 천공(토사/풍화암)	1,988m	-
THREAD BAR(￠65) 조립,설치	-	2,040m
그라우팅	-	1,988m
두부정리(￠65)	-	200EA
정재하시험	-	2회
철근가공조립	6.808TON	14.609TON
콘크리트타설(철근, 무근)	73.60㎥	55㎥

▢ 공사비 증감 대비표

공 종	도급공사비 (천원)			비 고
	당 초	변 경	증·감
재 료 비	57,488	265,198	207,710
노 무 비	32,620	260,538	227,918
경 비	12,133	31,612	19,479
소 계	102,241	557,348	455,107
제 경 비	22,759	149,652	126,893
합 계	125,000	707,000	582,000
부가가치세	12,500	70,700	58,200
도 급 비	137,500	777,700	640,200

※ 기존 계약내역 공종은 기계약단가(81.395%) 적용, 신규 공종은 협의단가(90.697%) 적용

▢ 조치계획

○ 청계천 연결 보도교의 당초 설계 교각 위치는 지장물 과다 및 이설공간 부족 등으로 기초 설치가 불가하여 지장물 재조사를 실시하여 교각 기초 설치 가능 위치로 재설계한 사항으로서,

○ 허용지지력을 확보하면서 현장여건에 맞게 기초 PILE공법 및 규격 변경을 반영하고자 하는 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 적정하므로 승인하고 추후 설계변경시 반영하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부. 끝.