문서번호	전시과-4554
결재일자	2017.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		전시과장	서울시립과학관장
이진원		이현배	07/14 이정모
협조
	교육지원과장		송재영

	- 서울시립과학관 전시설계 및 제작.설치 용역 - 전시시설 하자점검 종합계획

2017.07.

서울시립과학관

(전   시   과)

- 서울시립과학관 전시설계 및 제작.설치 용역 -

전시시설 하자점검 종합계획

서울시립과학관 전시시설에 대한 하자점검 종합계획을 수립하여 담보책임 존속기간 내 단계별 하자점검을 실시 후 시설물을 적정하게 보수하여 과학관 운영·관리에 만전을 기하고자 함

1		관 련 근 거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제69조(담보책임의 존속기간) 및 제70조(하자검사)

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제68조(담보책임의 존속기간) 및 제69조(하자검사)

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 중 제13장 공사계약일반조건(준용)

□ 준공시설물 하자관리 개선 방안 보고(행정2부시장 방침 제188호,`13.6.4.)

□ 2013년 예비준공검사 이행실태 보고(행정2부시장 방침 제27호,`14.2.6.)

2		점 검 개 요

□ 점검일시 : 하자담보책임기간(`16.12.01.~`18.11.30) 중 연 2회 이상 정기 하자검사 실시(최종하자검사 별도 실시)

□ 점검장소 : 서울시립과학관 내 상설전시실, 메이커스튜디오, 교육공간, 도서실, 사이언스홀, 로비 등 과업수행 공간 일체

□ 점검내용 : 전시시설물, 연출조명, 영상장비, 설명패널, 실물모형, 영상, 정보영상, 서버, 홈페이지, 통합관리 등 과업 일체

□ 점검방법 : 해당 시설, 장비 및 콘텐츠 등에 대한 현장실사

□ 점 검 반 : 전시과장, 담당 주무관, 시공사 담당자, 외부전문가 등

3		대상용역 현황

□ 용 역 명 : 서울시립과학관 전시설계 및 제작·설치 용역(장기계속)

□ 위    치 : 서울특별시 노원구 한글비석로 160(서울시립과학관 내)

□ 용역기간 및 소요예산

구 분	용 역 기 간	계 약 금 액	준 공 금 액
총 차	`15.09.10.~`16.11.30.	10,003백만원	9,988백만원
1 차	`15.09.10.~`16.11.30.	2,615백만원	2,615백만원
2 차	`16.06.02.~`16.11.30.	7,388백만원	7,373백만원

※ 계약금과 준공금 차액 :  산업안전보건관리비 미사용분 정산(14,600,000원 감액)

□ 계약업체 : ㈜미래세움(대표 : 최석중)

□ 주요내용 : 서울시립과학관 전시설계 및 제작·설치, 과학관 운영관련 내부 인프라 구축 등

4		하자점검 추진계획

□ 하자점검 보증내용

□ 계 약 명 : 서울시립과학관 전시설계 및 제작·설치 용역

□ 하자보증금액 : 금200,060,000원(금이억육만원)

□ 하자담보책임기간 : `16.12.01. ~ `18.11.30

□ 하자점검 추진일정

□ 1년차(기간 : `16.12.01. ~ `17.11.30.)

구 분	점 검 일 자	점검반(4인이상)	비 고
1회	`17.07.17.~`17.07.21.	과학관 담당자, 시공사 담당자
2회	`17.11.06.~`17.11.17.	과학관 담당자, 시공사 담당자

□ 2년차(기간 : `17.12.01. ~ `18.11.30.)

구 분	점 검 일 자	점검반(4인이상)	비 고
1회	`18.03.05.~`18.03.09.	과학관 담당자, 시공사 담당자
2회	`18.09.03.~`18.09.07.	과학관 담당자, 시공사 담당자
3회	`18.11.19.~`18.11.23.	과학관 담당자, 시공사 담당자, 외부 전문가 2인	최종검사 (총6인이상)

※ 하자담보책임기간 만료 14일 전부터 만료일까지의 기간 중 최종검사 별도실시

□ 점검내용

□ 각종 전시시설 및 운영인프라 정상작동 여부 및 파손 등 하자발생 건 확인

□ 점검방법 : 현장 관능점검

□ 최종검사 : 과업 전반에 걸친 종합 검사 실시

□ 하자보수 처리절차

			시설공사 준공/검사
			하자보증금 납부 또는 보증서 제출 (시공사→서울시)		-지방계약법 시행령 71조 및 시행규칙70조 ▪금액:계약금액의 2~10/100 ▪종류:현금, 보증보험증권 등 -지방계약법 시행령 69조 ▪기간:1년～10년(공종별)
	하자발생		정기 하자검사 실시 (하자담보책임기간중 2회/연)		- 지방계약법 시행령 70조 - “지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 ”제13장 공사계약일반조건 제10절 3-가
	하자지시 (서울시→시공사)		최종 하자검사 실시 (외부전문가 합동점검)		- “지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 ”제13장 공사계약일반조건 제10절 3-나 (하자기간 만료되기 14일전)
	하자보수계획서 제출 (시공사→서울시)		하자완료확인서 발급		- “지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 ”제13장 공사계약일반조건 제10절 2-다 완료확인서 발급일까지 보증금의 반환(요청시즉시)
	하자보수계획 적정여부 검토 ※ 적정시 보수시행 통보 ※ 미흡시 재검토 통보 (서울시)		하자담보책임기간 종료
	하자보수 시행 (시공사) ※시공사 불이행시 : 연대보증사, 보증서 발급기관에 이행 촉구
	하자보수완료검사원 제출 (시공사→서울시)
	하자보수검사 (계약금액 3천만원이하 검사조서 생략)

※ 최종검사 시행시 외부전문가와 합동 검사(계약금 100억원이상 : 2명 이상)

5		행 정 사 항

□ 교육실 및 부속시설 하자점검을 위한 협조 요청 : 교육지원과

□ 용역업체(㈜미래세움)와 점검일정 협의 및 담당자 입회요청

□ 최종검사 시행 시 참여 외부전문가 섭외

□ 하자발생시 용역업체 통보, 신속한 조치 요청 및 하자검사 결과 보고

□ 하자검사조서 작성 및 하자보수관리부 비치

붙임 1. 하자검사조서 1부.

2. 하자보수관리부(양식) 1부.  끝.