투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	도로확장에 따른 버스정류장 임시 이설 변경(강남순환 8공구)

1. 토목부-13099(’17.6.23.)호 및 과천시 교통과-42536(’17.6.29.)호 관련입니다.

2. 양재대로 도로 확장 공사에 따른 버스정류장 임시 이설 기간을 변경하고자 하오니 공공 도로 사업임을 감안하여 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 버스정류장 현황

○ 위  치: 과천시 은행나무길 7 앞

○ 정류장: 주암동(21029, 37024)

○ 임시 이설 기간

- 당초: 2017.7.1.~7.31.

- 변경: 2017.7.17.~8.10.

붙임: 버스정류장 이설 계획도 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(버스정책과장),과천시장(교통과장)
주무관	김구		도시고속도로과장	명경출		토목부장	07/14 김영수
협조자
시행	토목부-14816	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8664	/전송	02-3708-2599	/	neuf@seoul.go.kr	/	대시민공개