투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 승인)

▢ 업무지시현장 :  서울소방행정타운 건립(1단계) 기계설비공사 (주)토문엔지니어링 건축사사무소, 서울소방행정타운 건립(1단계) 기계설비공사 주식회사 건축사사무소 건원엔지니어링

▢ 작 성 일 자 : 2017-07-13 14:07:42

▢ 지 시 내 용 :

1. 소방(CM) 제17-191호(2017.6.14.)와 관련입니다

2. “서울소방행정타운건립(1단계) 기계설비공사”와 관련하여 위 대호로 실정보고한 “지열 천공위치 변경”을 검토한 결과 적정하다고 판단되어 실정보고를 “승인”하니 품질관리 및 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. 끝.

주무관							추한영			열빛총괄과장					07/17 유병기
협조자
시행			설비부-12220									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8610						/전송			02-3708-8659					/	cc2436@seoul.go.kr												/	대시민공개