투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시교통방송
수신	서울산업진흥원대표이사
(경유)	S-Plexcenter 장동해 책임
제목	에스플렉스센터 방송프라자 구매장비 비교검토 결과 통보 및 사업 조속 진행 요청

1.  인프라운영팀-1333호(2017.7.14.)“에스플렉스센터 방송프라자 구매장비 검토요청” 관련입니다.

2. SBA에서 우리 교통방송에 요청한 방송장비관련 계약상대자(예정)의 제안장비 를 발주 규격과 비교 검토한 결과를 붙임과 같이 통보합니다.

3. 또한, 현재 귀 기관의 방송장비 구매 지연으로 인해 우리교통방송의 방송프라자 구축 사업 역시 지연되고 있어 방송프라자에서의 방송제작진행에 막대한 지장을 초래하고 있습니다.

가. 교통방송 방송플라자 구축 사업

- 사업 기간 : 2017.5.16.~ 10.13.

4. 이와 관련, 귀 기관 의 구매방송장비가 8월말 까지 납품되지 않을 경우 교통방송 방송플라자 구축 사업을 완료할 수 없어 스튜디오 사용을 할 수 없게 되니 사업기간 내에 완료 될 수 있도록 방송장비 구매 사업의 조속한 진행을 요청 합니다.

*붙임 1. 비교검토서 1부.

2. 방송프라자 스튜디오 구축 장비선정사유 1부.     끝.

	서울특별시교통방송 대표
기술관리팀장	김응석		기술관리부장	손재달		기술국장	07/17 변동운
협조자
시행	기술국-5990	(		)	접수		(		)
우	03909	서울특별시 마포구 매봉산로 31 (상암동) s-plexcenter 교통방송 6층 기술국	/	http://www.tbs.seoul.kr
전화	02-311-5511	/전송	02-311-5519	/	chamion@seoul.go.kr	/	부분공개(5)