문서번호	자연생태과-13883
결재일자	2017.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	생태복원팀장	자연생태과장
이정수	박경옥	07/17 하재호

양재대로 녹지연결로 조성 추가예산 요청사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.

푸른도시국

(자연생태과)

양재대로 녹지연결로 조성 추가예산 요청사항 검토보고

도시기반시설본부 방재시설부-11546(2017.7.4.)호로 공사중에 있는   양재대로 녹지연결로 조성사업에 대한 추가예산 확보 및 재배정 요청이   있어 내용 검토하고 그 결과를 다음과 같이 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

위    치 : 강남구 개포동 1274번지 일원(양재대로)

규    모 : L52.6 × B20m(DPS 합성형교)

사업내용 : 녹지연결로(달터공원~구룡산) 설치 및 수목식재 등

사업기간 : 2013~2017년

사 업 비 : 6,760백만원(설계, 보상, 공사비 포함가)

Ⅱ		추진경위

2013.6~12월 : 타당성조사 및 기본계획 용역

2013.11월 : 투자심사(조건부)

- 연결로 지장물 정비 및 사업기간은 2015년 이후 조성

2015.1~2016.2월 : 기본 및 실시설계용역시행(도기본 토목부)

- ‘15.10.23 : 교량형식 공법선정 위원회 개최

- ‘15.12.15 : 서울시 도시공원위원회 심의

- ‘16.01.15 : 건설기술심의

- ‘16.02.25 : 설계경제성 검토(VE)

- ‘16.02.29 : 용역 완료 후 총괄건축가 자문(4.1)

2016.4~6월 : 계약심사 및 공사발주(도기본 방재시설부)

- ‘16.04.28 : 공사 발주전 계약심사

- ‘16.06.20 : 공사착공(’17.10월 준공 예정)

	공사추진 현황
□ 공사기간 : ‘16.6.20~’17.10.30(16개월) □ 현공정율 : 86% □ 추진내용 - 교대 설치 및 DPS거더 교량거치완료 - 현재 슬래브 거푸집 및 철근가공조립 진행

Ⅲ		예산 요청사항

요청기관 : 도시기반시설본부(방재시설부)

요 청 액 : 135백만원

(단위:백만원)

총공사비		기집행	2017 예산현액			추가요청액		비고
당초	변경		계	본예산	이월비	계	시설비
6,760	6,895	1,919	4,841	4,309	532	135	135	공사비

Ⅳ		검토사항

양재대로 녹지연결로 조성사업은 금년도에 공사비 등으로 4,309백만원을 편성, 사업추진부서(도기본 방재시설부)에 전액 재배정한 상태이며 2017.10월까지 공사완료 예정에 있음.

- ’16년 예산에 2,007백만원(공사비 1,990, 감리비17) 편성 및 재배정

- ’17년에도 4,309백만원(공사비 4,065, 감리비 244) 편성하여 재배정

※ 공사시행 중 기 편성예산 외 135백만원 추가 요청

추가 예산 요청한 사항은 공사 추진과정에서 현장여건 상이 등에 따라 부득이 설계변경 요인이 발생된 사항으로 안전시공 및 원활한 사업추진을 위해 부족예산 지원 필요

- DPS거더 설치 관련 교통소통대책 용역비 및 교통 전면통제에 따른 안전시설비 추가

- 교량받침 형식(포트→탄성받침)변경, 교대날개벽 보강공사비 등 추가비용 발생

양재대로 녹지연결로 조성공사 추가 예산요청에 따른 부족 예산은 단절된 녹지축 연결사업의 시설비 집행 잔액 범위내에서 지원 가능

- 호암로 녹지연결로 공사비에서 집행잔액(135백만원) 발생

Ⅴ		조치계획

사업추진부서에서 추가 예산 재배정 요청한 사항은 단절된 녹지축 연결사업의 시설비(호암로 녹지연결로) 집행잔액을 활용 지원

진행중인 공사에 대한 완성도 제고 및 원활한 사업 추진을 위해 사업추진부서에 적기 재배정 조치코자 함.

- 재배정액 : 135백만원(도기본 방재시설부)

- 예산과목 : 생태계복원 및 보전과 야생동식물보호, 생태계복원, 단절된 녹지축 연결, 시설비(401-01)

붙  임 : 양재대로 녹지연결로 추가 예산배정 요청 세부현황 1부. 끝.