상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	"한강상 PSC교량 안전강화공사-올림픽대교"계약심사 결과 통보

교량안전과-5783(2017.3.31.), -6526(2017.4.11.보완), -8783(2017.5.17.추가보완)호와 관련한 계약심사 결과를 아래와 같이 알려드리니, 다음과 같이 조치하시기 바랍니다.

1. 심사결과

가. 건  명 : 한강상 PSC교량 안전강화공사-올림픽대교

나. 심사결과                                              (단위 : 천원)

예 산 서 세부 사업명	예산 과목	예산액	심사요청액 (A)	심사금액 (B)	절 감 액 (C)=A-B	절감률 (C/A)
한강상 PSC교량 안전강화	시설비	6,235,000	1,742,400	1,641,281	101,119	5.8%

다. 세부 심사내역 : 붙임

2. 해당 부서별 조치사항

가. 발주부서

-「서울특별시 계약심사업무 처리규칙」제7조 규정에 의거, 계약 심사결과에 따른 사업비를 재산정하여 사업추진 또는 이의가 있는 경우 재심사 요청

- ‘표면처리’ 공종에 대하여 발주부서에서 제시한 품으로 적용하였으나, 근거가 미비함으로 공종의 필요성과 품의 적정성을 당 현장 공사중 실사를 거쳐 확정하고, 설계변경(정산) 방안 강구 할 것

나. 예산부서

-「지방자치단체 세출예산 집행기준(행자부 예규 제1호)」제Ⅲ장 1-1규정에 따라 계약심사 조정액 범위 내에서 발주부서에 예산배정 처리하고, 불요불급한 사업에 설계변경 등을 통하여 집행되지 않도록 예산배정 제도를 통해 관리

다. 계약부서

-「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행자부 예규)」에 따라 ‘시설공사 분야’ 계약심사 결과(붙임1, 붙임2)를 입찰공고 시 게재(공개)

붙 임 1. 계약심사 조정내역 및 사유서 1부.

2. 심사결과 요약서 및 세부 내역 1부.  끝.

	계약심사과장
수신자	교량안전과장,재무과장,예산담당관
주무관	박홍		토목심사팀장	김종호		계약심사과장	05/22 안호
협조자
시행	계약심사과-10192	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 9층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-3328	/전송	02-2133-1032	/	hong2mi@seoul.go.kr	/	대시민공개