문서번호	정수시설과-6891
결재일자	2017.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동		유영춘	07/17 代안창수
협조

2정수장 여과지 배기덕트 설치공사 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.

영등포아리수정수센터

『2정수장 여과지 배기덕트 설치공사』설계변경 보고

우리 정수센터 2정수장 여과지 배기덕트 설치공사 시행중 설계변경 사항이 발생하여 설계변경을 시행하고자 보고함.

개요

◯ 공 사 명 : 2정수장 여과지 배기덕트 설치공사

◯ 공사기간 : 2017. 05. 19. ～ 07. 20.

◯ 공사금액 : 금61,753,690원

◯ 시공업체 : (주)탑벤 대표 안명섭

◯ 변경내용 : 별첨 “설계내역서” 참조

◯ 설계변경 관련근거

- 지방자치단체 공사계약일반조건 제4장(행정안전부예규 제253호)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장8절,13장6절(행정안전부예규 제34호)

설계변경 사항

◯ 신규물품 발생 및 시공물량 증․감에 따른 설계변경

- 진동 및 소음 감소를 위한 배기덕트 연결 후렉시블 추가설치

- 배기덕트 물량 증․감

- 배기팬 형식변경(원심형팬→벤트랜팬)

- 물량증감내역 : “설계변경내역서” 참조

◯ 건강 및 연금보험료, 노인장기요양보험료 삭감

- 공사계약 일반조건 제40조의 2에 의거 시공사측에서 납부한 사실이 없기에 삭감처리

◯ 환경보전비 삭감

- 환경보전비 미사용에 따른 삭감

◯ 공사비 증감 내역

구 분	재 료 비	노 무 비	제 경 비	공사원가	부가가치세	총 공 사 비
변 경 전	32,341,803	14,277,339	9,520,577	56,139,719	5,613,971	61,753,690
변 경 후	33,130,524	14,308,371	8,762,105	56,111,000	5,611,100	61,722,100
증 감 액	증 788,721	증 31,032	감 848,472	감 28,719	감 2,871	감 31,590

조치계획

◯ 변경된 설계내용에 따라 건설공사 설계변경 심의 및 기성준공 처리절차 운영계획에 의거 설계변경 심의위원회를 개최하여 처리하고자 합니다.

첨부 : 1. 설계변경 내역서 및 도면 1부

2. 계약금액조정 검증확인서 1부. 끝.