문서번호	여의도공원관리사무소-3126
결재일자	2017.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장
김은희	고정곤	07/17 정일환

여의도공원 산책로포장 정비공사

설계도면 작성용역 기간연장 검토 보고

2017.  7.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

여의도공원 산책로포장 정비공사

설계도면 작성용역 기간연장 검토보고

여의도공원 산책로포장 정비공사 추진 관련 사업범위 조정 등에 따른 도면작성 용역기간 부족으로 완수기한을 연기하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 여의도공원 산책로포장 정비공사 설계도면 작성용역

○ 기    간 : ’17. 6. 5. ~ 7. 24.

○ 내    용 : 설계도면 작성

○ 용 역 비 : 8,318,200원

○ 계 약 자 : ㈜스마일 그룹 대표 권민정

□ 추진현황

○ ’17. 5. 22. : 용역 발주

○ ’17. 6.  5. : 용역 착수

□ 완수기한 연기 검토

○ 완수기한

- 당  초 : ’17. 6. 5. ~ 7. 24.

- 변  경 : ’17. 6. 5. ~ 8. 24.

○ 연기사유 : 사업범위 및 공사내용 조정

○ 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 향후계획

○ ’17.   8.  : 설계심의, 계약심사

○ ’17.   9.  : 공사발주, 관급자재 구매 의뢰

○ ’17. 10.  : 공사착공