	서울특별시도시기반시설본부
수신	토지 및 건물 소유자
(경유)
제목	도시계획시설(도로)사업 실시계획 열람공고 알림

1. 시정발전을 위하여 항상 협조하여 주시는 귀하께 감사드립니다.

2. 우리 시에서는 금천구 시흥동 963, 963-34호 부지가 공사구간에 일부 저촉되어 2016. 8.11.실시계획 변경고시한 후, 보상기관(서울주택도시공사)에서 보상진행중에 있으나 당초 준공예정일(2017.5.19.)이 경과되어 준공예정일을 변경(2018.3.31.)하고자

3. 『강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사(시흥동 남북간연결도로 개설)』에 대하여  2017.7.13.일 서울시보에 도시계획시설(도로)사업 실시계획변경 열람공고(서울특별시 공고 제2017-1624호)하였음을 알려드리니 의견이 있으시면 열람기간 내에 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 의견제출처

1) 서울특별시 도시기반시설본부 토목부(☎02-3708-8666)

2) 서울특별시 금천구 도로과(☎02-2627-1805)

나. 의견제출기간 : 2017. 7. 27(목)까지

붙임 : 공고문, 토지 및 물건조서 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	남덕희		도시고속도로과장	명경출		토목부장	전결 07/18 김영수
협조자
시행	토목부-15035	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/	heedeok@seoul.go.kr	/	부분공개(6)